DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	21/A/7
Číslo smlouvy zhotovitele:	22080030

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Dům kultury Teplice

se sídlem:			Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO:				00081221
DIČ:				CZ00081221 
telefon:				417 515 921
bankovní spojení:		Komerční banka Teplice
číslo účtu:			533501/0100
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
ve věcech technických:	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
stavební dozor:		xxxx xxxxx xxxxxx

Z h o t o v i t e l :			Metrostav a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu 
oddíl B, vložka 758 (je-li zapsán)

	se sídlem:		Praha – 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
kontaktní adresa:  	Dělnická 14, 400 04 Trmice
	IČO:			000 14 915
	DIČ:			CZ00014915
	telefon:			+420 724 501 534
	bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:             	1809071/0100
zastoupený:	Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8, a Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8 Metrostav a.s., oba na základě plné moci
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8
			Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
ve věcech technických:	xxx xxxxxx, vedoucí výroby divize 8
			xxxxxx xxxxxx, vedoucí projektu
			xxx xxxx, hlavní stavbyvedoucí

Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 28. 2. 2022 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK I. etapa“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které mají vliv na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

Článek III
Vícepráce
3.1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek IV
Méněpráce
4.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 580 189,84 Kč bez DPH.
5.2	Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 159 957,14 Kč bez DPH.
5.3	Rozdíl mezi částkou specifikovanou v bodě 5.1 tohoto dodatku a částkou specifikovanou v bodě 5.2 tohoto dodatku činí částku ve výši 420 232,70 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek VI
Cena díla
6.1	Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD............................................................... 14 784 206,73 Kč
Cena za vícepráce bez DPH ......................................................................    420 232,70 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................15 204 439,43 Kč

DPH (21 %) dle SoD................................................................................. 3 104 683,41 Kč
DPH (21 %) za vícepráce............................................................................ 88 248,87 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..…..  3 192 932,28 Kč

Celková cena včetně DPH dle SoD............................................................ 17 888 890,14  Kč
Cena za vícepráce včetně DPH ......................................................................  508 481,57 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2..................  18 397 371,71 Kč

Článek VII
Změna termínu dokončení

7.1	Ve Smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2022 popsané v bodě 2.1 tohoto dodatku bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do tří měsíců ode dne předání staveniště. Vzhledem k tomu, že provádění díla bylo na základě pokynu objednatele přerušeno, mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:6.2 Termín dokončení prací: 12. 9. 2022

7.2 Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku aktualizovaný harmonogram, kterým se zcela nahrazuje harmonogram, který byl přílohou smlouvy o dílo při jejím uzavření.

 Článek VIII
Závěrečná ustanovení

8.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

8.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze    
      změny
8.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
      zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv
      vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.6  Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0697/22 ze dne 19. 8. 2022.

V Teplicích, dne 31. 8. 2022				V………………dne……………………….

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	
								2. 9. 2022
..................................................			..................................................
Ing. Přemysl Šoba					Ing. Petr Ort 
Ředitel DK Teplice					Oblastní ředitel pro Ústecky kraj
							Na základě plné moci 
							
								4. 9. 2022
							………………………………………………
							Ing. Josef Špryňar
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
Na základě plné moci