DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	21/A/7
Číslo smlouvy zhotovitele:	22080030

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Dům kultury Teplice

se sídlem:			Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO:				00081221
DIČ:				CZ00081221 
telefon:				417 515 921
bankovní spojení:		Komerční banka Teplice
číslo účtu:			533501/0100
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
ve věcech technických:	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
stavební dozor:		xxxx xxxxx xxxxxx

Z h o t o v i t e l :			Metrostav a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu 
oddíl B, vložka 758 (je-li zapsán)

	se sídlem:		Praha – 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
kontaktní adresa:  	Dělnická 14, 400 04 Trmice
	IČO:			000 14 915
	DIČ:			CZ00014915
	telefon:			+420 724 501 534
	bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:             	1809071/0100
zastoupený:	Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8, a Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8 Metrostav a.s., oba na základě plné moci
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8
			Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
ve věcech technických:	xxx xxxxxx, vedoucí výroby divize 8
			xxxxxx xxxxxx, vedoucí projektu
			xxx xxxx, hlavní stavbyvedoucí

Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 28. 2. 2022 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK I. etapa“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly neočekávané okolnosti, které mají vliv na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak  přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

Článek III
Změna termínu dokončení

7.1	Ve Smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2022 a jejího dodatku č.2 bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 12.09.2022. Vzhledem k nepředvídaným okolnostem poruchy betonového prefabrikovaného sloupu při kotvení konstrukce venkovního schodiště na západní fasádě a od projektové dokumentace odlišnému provedení nosné konstrukce vnitřního schodiště ke kinu, na kterém nelze provést projektem předpokládaný protipožární obklad, bylo nutné tyto a navazující práce, do jejich vyřešení pozastavit. Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:6.2 Termín dokončení prací: do 30.09. 2022

7.2 Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku změnový list č.003.

 Článek VIII
Závěrečná ustanovení

8.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

8.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze    
      změny
8.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
      zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv
      vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.6  Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0706/22/22 ze dne 7. 9. 2022

V Teplicích, dne 11. 9. 2022			V ………………, dne ……………..

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	
								9. 9. 2022
..................................................			..................................................
Ing. Přemysl Šoba					Ing. Petr Ort 
Ředitel DK Teplice					Oblastní ředitel pro Ústecky kraj
							Na základě plné moci 
							
								10. 9. 2022
							………………………………………………
							Ing. Josef Špryňar
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
Na základě plné moci