OBJEDNATEL:                                                                                        ZHoToVlTEL:
Dům kultury Teplice						METRosTAV a.s.
Mírové náměsti 2950						Koželužská 2450/4 Libeň
415 01 Teplice							180 00 Praha 8

				ZMĚNOVÝ L|ST
Projekt		:	Rekonstrukce foyer DK l. etapa
část:			Architektonické-stavební řešení
Název:			Posun termínu dokončení protipožárního obkladu a venkovního schodiště u    
			západní fasády                              
zL č.:			003
Datum vystavení:	05.09.2022
Podklady:                                                    Dsp                                       Počet příloh:

Popis změny:	Změnový list stanovuje nový termín dokončení protipožárního obkladu a venkovního schodiště na západní fasádě objektu z důvodů neočekávaných okolností, které se objevily V průběhu realizace prací.
Zdůvodnění změny:	V průběhu realizace stavby nastaly tyto neočekávané skutečnosti:
a) Při instalaci ocelové konzoly schodiště došlo k vytržení chemické kotvy ze stávajícího železobetonového sloupu, Příčinou této události byla pravděpodobně špatná materiáloVá skladba železobetonového píefabrikovaného sloupu, kdy se v místě vlepení tažené kotvy nacházelo hnízdo s velkým obsahem kameniva a malým obsahem cementové matrice, čímž došlo k oslabení betonu, který nebyl schopen přenést tahové napětí od kotvy. Na základě zjištění této poruchy bylo schodiště demontováno a bylo nutné ve spolupráci se statikem projektu přistoupit k úpravě návrhu kotvení s ohledem na již vyrobenou konzolu. Na základě upraveného návrhu kotvení bude provedena úprava ocelové konzole a jejího zakotvení k betonovému sloupu,
b) Po demontáži podhledu schodiště z foyer (z kóty l0,000 m) ke kinu (kóta -a,000 m) bylo zjištěno, že schodiště je proVedeno odlišně od předpokladu uvažovaného v projektu, Na rozdíl od předpokladu je schodiště provedeno s křížoui mi uiztuhami (zavětrováním) a oceloVá konstrukce je opatřena protipožárním ná5třikem. Dodavatel nového protipožárního obkladu informoval GD, že za této situace není schopen provést nouý obklad zavětrování materiálem t1.40 mm, neboť by tím nebylo možné dosáhnout požadované ochrany
oceloVé konstrukce před žárem a současně je nutné odstranit stávající nástřik z nosných prvků schodiště a obložit.ie materiálem tl. 120 mm. o situaci byl informován GP, který Ve spolupráci 5e statikem a specialistoU na požární bezpečnost navrhl, resp. odsouhlasil náVrh odborného dodavatele na nové provedení protipožárního obkladu.

UVedené neočekávané změny vedly k tomu, že práce na těchto částech staVby byly do vyřešení pozastaVeny, a s hledem na nezbytné úpravy vyžadované zjištěnými skutečnostmi dojde k posunu jejich realizace, U venkovního schodiště následně dojde i k prodloUžení termínu realizace montáže konstrukcí venkovního zábradlí a zastřešení schodiště, které .isoU Vázány nezbytnou podmínkou instalace betonového prefabíikovaného schodiště. V celkovém termínu dokončení díla je také zapracováno nezbytné přerušení prací vyvolané nUtným uvolněním venkovního prostoru u západní fasády pro konání společenských akcí ve dnech 15.-18.09. 2022 (czech Fashion Week 2022) a 22.-24.09.2022 (Jarmark chutí Teplice).
Dle závěrů z kontrolního dne, konaného 05.09.2022, je reálný termín dokončení stanoven na 30.09.2022.

Cenový dopad (je-li nějaký)	přípočty 	odpočty 	celkem za změnu
	bez DPH		0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
               DPH	21%	               0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
               vč. DPH		0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
Časový dopad(je-li nějaký)             ANO         jedná se o upřesnění termínu dokončení z důvodu	  					přerušení  stavby                                                          
Dopad do standartu(je-li nějaký)  NENÍ
Ddopad do změny PD(je-li nějaký)  ANO 	úprava kotvení konzoly schodiště, změna provedení
Dodopad na smluvní milníky(je-li nějaký)	NENÍ
Rizika a důsledky změny:		NEJSOU
Vystavil
xxxxxxx xxxxxx				podpis			datum 05.09.2022
(ZHOTOVITEL)
Ověřil
xxxx xxxxx xxxxxx			podpis			datum 05.09.2022
(TDS)
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx		podpis			datum 05.09.2022
(OBJEDNATEL)
Schválil:
Ing. Přemysl  Šoba			podpis			datum 05.09.2022
(OBJEDNATEL)