Číslo smlouvy objednatele:	22/A/6
Číslo smlouvy zhotovitele:	8022038

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební akci
„Bezbariérové úpravy v objektu ZD Teplice“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l:			Dům kultury Teplice

se sídlem:			Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO:				00081221
DIČ:				CZ00081221 
telefon:				417 515 921
bankovní spojení:		Komerční banka Teplice
číslo účtu:			533501/0100
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
ve věcech technických:	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
stavební dozor:		xxxx xxxxx xxxxxx

Z h o t o v i t e l :			POHL cz, a.s.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

	se sídlem:		Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
kontaktní adresa:  	odštěpný závod Roztoky
			oblast Sever
			Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
	IČO:			25606468
	DIČ:			CZ25606468
	telefon:			+420 724 058 031
	bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
				Česká spořitelna, a.s.
	číslo účtu:            	117569233/0300
				8850392/0800
	zastoupený:		PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
				ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
ve věcech technických:	xxxxxxx xxxxx xxx., vedoucí výroby
stavební dozor:		xxxx xxxxxxx xxxxxx

Článek II
Úvodní ustanovení

2.1	Smluvní strany shora označené prohlašují, že mezi sebou dne 29. 09. 2022 uzavřely smlouvu 
o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Bezbariérové úpravy v objektu ZD Teplice“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které mají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III
Změny smlouvy

3.1	Smluvní strany se s ohledem na požadované vícepráce a méněpráce ze strany objednatele dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

3.2	Článek 5.1 Smlouvy, který zní:
	
5.1		Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH			6 666 666,00 Kč
DPH (21 %)				1 399 999,86 Kč
Celková cena včetně DPH		8 066 665,86 Kč

	    se mění takto:

5.1      Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Původní cena bez DPH			6 666 666,00 Kč
Cena víceprací bez DPH			  738 991,14 Kč
Cena méněprací bez DPH		- 341 069,80 Kč
Celková cena bez DPH		          7 064 587,34 Kč
DPH (21 %)			         1 483 563,34 Kč
Celková cena včetně DPH	        8 548 150,68   Kč

3.3	Článek 6.2 Smlouvy, který zní: 

6.2	Termín dokončení prací:  26.2.2023

se mění takto:

6.2       Termín dokončení prací:  12.3.2023

Článek IV
Závěrečná ustanovení

4.1	Změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem plně odpovídají a jsou provedeny v souladu s čl. 6.7 Smlouvy a zejména pak v souladu s čl. 14.1 Smlouvy.
4.2	Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.3    Tento dodatek je vyhotoven v originálu v elektronické podobě.
4.4    Tento dodateko nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.5  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. 
4.6   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4.7    Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0197/23 ze dne  24/02/2023.

Přílohy: Změnové listy
	  Technický popis renovace kamenné dlažby

V Teplicích, dne 24. února 2023	                      			V Chabařovicích, dne 24. února 2023

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	

..................................................			..................................................
Ing. Přemysl Šoba					PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
ředitel DK Teplice					ředitel oblasti Sever, 
na základě plné moci