DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	VZ/22/A/3
Číslo smlouvy zhotovitele:	2300002
(dále jen „dodatek")
uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ"), mezi následujícími smluvními
stranami:
	Článek I
Smluvní strany	
Objednatel:	Dům Kultury Teplice	
se sídlem:	Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice	
IČO:	00081221	
DIČ:	CZ00081221	
telefon:	417 515 921	
bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka Teplice 533501/0100	
zastoupený:	Ing. Přemysl Soba, Ředitel DK Teplice	
oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Soba	
ve věcech technických: stavební dozor:	XXX xxxxxxxx XXXXXXXX
Xxx XXXXXXX xxxxxx	
Zhotovitel :	IR.Construction s.r.o.
objekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu spisová značka C14364	
se sídlem:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem	
kontaktní adresa:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem	
IČO:	25041738	
DIČ:	CZ25041738	
telefon:	+420 xxx xxx xxx	
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	

číslo účtu: zastoupený:

289387719/0300
xaxxxx xxxxxx, jednatel společnosti
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: XXXXXX XXXXXX, jednatel společnosti
ve věcech technických: XXXXX XXXXX, technický a provozní ředitel
Článek II
Preambule
2.1.Mezi smluvními stranami došlo dne 25. 4. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa". V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méně prací. Současně dochází k posunutí termínu dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.
Článek III
Vícepráce
3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek IV
Méněpráce
4.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potře ba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek V
Cena víceprací a méněprací
4.2	Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 289 612,42 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.
Článek VI
Cena díla
6.1	Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

.. 71 008 431,31 Kč
289 612,42 Kč
71 298 043,73 Kč

Celková cena bez DPH dle SoD....			 Cena za vícepráce bez DPH 								
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1

DPH (21 %) dle SoD..............	      .14	911 770,58 Kč
DPH (21 %) za vícepráce......	 60	818,61 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.l......................... 14 972 589,19 Kč
Celková cena včetně DPH dle SoD										 85 920 201,89 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH			     350	431,03 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1	  86	270 632,92 Kč
Článek VII
Změna termínu dokončení
7.1	Ve Smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023 bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 24. 12. 2023. Vzhledem k situaci, že jednotlivá zpoždění nebylo možné realizovat souběžně, je celkový posun dokončení díla o 3 dny dán prostým součtem jednotlivých časových posunů. Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 6.2 Termín dokončení prací: do 27. 12. 2023.
7.2	Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku změnový list č. 1.
Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
8.2	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8.3	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
8.4	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8.6	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0799/23
Přílohy:
1)	Změnový list č. 1
2)	Výpis z obchodního rejstříku

V Teplicích, dne
Za objednatele:

Ing. Přemysl Soba
Ředitel DK Teplice

V Ústí nad Labem, dne
Za zhotovitele:
Daniel Přibyl
Jednatel společnosti
OBJEDNATEL, Dům kultury Teplice Mírové náměstí 2950 41501 Teplice
ZHOTOVITEL;
IR.Coneiructlon s.r.o, Orůždanská 856/74B 4COO7 Úsli nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt:
Část:
Název:
2LČ.:
Datum vystaveni:
Podklady;

Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa Archltektonlcko-stavební řešení Změny stavby, posun terminu 01 02.10.2023
DSP

Popis změny:	Změnový list obsahuje vyčíslení tměny rotsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace, požadavky objedenatele na změny nebo doplněni a zohledňuji také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výmě'.	
Zdůvodněni změny:	Při realizaci stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o poíadavky objednatele a zohlednit rozdíly mezi PD a výkazem výměr.
Jednotlivé změny jsou zpracovány (ormou dílčích rozpočtů a jsou součástí tohoto Změnového listu.
Mezi skutečnosti, které se promítly do změny rozsahu prací patři zejména:
01 • Koncertní sál ■ únikové dveře na fasádě • nerealizuji se
C6-Chodba l.NP • změna dveří na dvoukřídlé
A? .'Aí!!05^' ’ únikové dveře na fasádě ■ nerealizuji se
14 • Spisovna SčF • stavební úpravy
16 • Zázemí KS - změna šířky ďyeříj doplněni magnetů EPS
Aí^Oopočet demontáže svítidel, stávajících rozvaděčů
46 ^Vzduchotechnika ■ doplněni, úprava, zařízeni č.3,14,18, KINO
Výše popsané zrněny byly projednány v rámci aktuálního řešení průběhu stavby v průběhu kontrolních dnů, případné vyplynuly z upřesnění technického a architektonického řešeni tak jak bylo předmětem DPS a architektonické studie, případné požadavky objednatele.	

Počet příloh:

Cenový dopad (je-li nějaký):	Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:	
bez DPH	752 213,37 Kč	■462 600,95 Kč	289 612,42 Kč	
DPH 21%	157 964,81 Kč	■97146,20 Kč	60 818,61 Kč	
vč. DPH	910178,18 Kč	•559 747,15 Kč	350 431,03 Kč	
Časový dopad (je li nějaký):	ANO	♦ 3 dny - zpoždění předání staveniště
Celkový dopad do termínu je 03 dnů = termín dokončení díla se posouvá na 27,12.2023.	
Dopad do standartu (je-li nějaký);	NENÍ		
Dopad do změny PD (Je-li nějaký):	NENÍ	zjištěné změny nemají dopad do PD	
Dopad na smiuvní milníky (je-li nějaký):	ANO	prodloužení terminu milníku č.2 - dokončení bouracích práci schodišti l.PP 4.NP	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU		

Vystavil:
Xxxxx XXXXX
(ZHOTOVITEL)
Ověřil:
XXX XXXXX XXXXXX
(TDS)
Ověřil:
XXX XXX XXXX XXXXXX (PROJEKTANT)
Schválil:
.ny,. Přemysl Šoba (OBJEDNATEL)
Datum: 03.10.2023
Datum: 03.10.2023
Datum: 03.10.2023
Datum: 03.10.2023

Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 1/2023
Stavba:	Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa	
Objednavatel:	Dům Kultury Teplíce
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem	
TDI:	Ing. XXXXX XXXXXX	

poř. číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH	
1	Koncertní sál-únikové dveře na fasádě	184 193,32 Kč	- Kč	184 193,32 Kč	
6	Chodba 1.NP-změna dveří na dvoukřídlé	49 000,00 Kč	77 040,00 Kč	28 040,00 Kč	
12	Kinosál-únikové dveře na fasádě	46 047,83 Kč	- Kč	46 047,83 Kč	
14	Spisovna SČF - stavební úpravy	- Kč	128 251,23 Kč	128 251,23 Kč	
16	Zázemí KS-změna šířky dveří+doplnění magnetů EPS	76 000,00 Kč	90 254,00 Kč	14 254,00 Kč	
44	Dopočet demontáže svítidel, stávajících rozvaděčů	- Kč	56 765,14 Kč	56 765,14 Kč	
46	Vzduchotechnika-doplnění, úprava, zařízení č.3, 14, 18, KINO	107 359,80 Kč	399 903,00 Kč	292 543,20 Kč	
		- Kč	- Kč	KČ	
Celkem	- ' : 4626^9$:^	752 213,37 Kč J /	61232 Kč.

Cena bez DPH	289 612,42 Kč
^ékisdní	21.&CK
snížená	1 5,00*.

Cena s DPH
v
CZK
350 431 Kč

		Koncertní sál-únikové dveře na fasádě			
Stavba:	Rekonstrukce foyer DK TepHce_2.etapa				1	
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice		Dat	um:	25.09.2023	
Zad a vátí Zhotovíte	T'	Dům Kultury Teplice IR.Construction s.r.o.		Projektant:
Zpracovatel:		
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				-184 193,32	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-184 193,32	
D	766	Konstrukce truhlářské				-184 193,32	
	939 K	■76666.12	Dveře dřevěné ozn. 12 1800x2100 mm; repase stávajících dřevěných ( masiv dub) dvoukřídlých dveře s profilací s I dřevěnými atyp. madly včetně repase podlahového	!
samozavírače, osazení panikového madla na obou křídlech včetně případných úprav dveří, zámek v	kus i
i
I !	-4,000	46 000,00	i
-184 000,00.	
w		D.1.1.13_Tabulka__okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 12"-4,000
Součet		-4,000
-4,000			
995 K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,097	1 330,00	-129,01	
; 996 K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,097.	663,00	-64,31	

zákiadrd

Chodba I.NP-změna dveří na dvoukřídlé
Stavba:	6
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice	Datum:	25.09,2023
Zadavatel:	Dům Kultury Teplíce	Projektant:
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	
| PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem
d PSV	Práce a dodávky PSV
	£ _766	_ Konstrukce truhlářské	
i	Dveře ozn.dle tabulky dveří 21 p/900+550/1970-EW
1157 K '76666.58	:30DP3/C2/koo/Sm/Panik, otevíravé plné, dřevěné RAL
1	7005, zárubeň ocel.RAL 7005, bezprahové,kouřotěsné
vv	Poznámka k položce
vv	požadovaná změna dle knihy změn 29.8.2023
.	W		1	_
li'	i	,
:Dveře ozn. 21/P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLE DVEŘE
;	OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL
947 K 76666 21	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM El 30DP3/C2/Sm/PANIK
:	I /oooo.zi	: KOULE - PANIKOVÉ MADLO SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK
'	'VLOŽKOVÝ MAGNET OVLÁDANÝ EPS VČETNĚ
: DODÁVKY PŘÍDRŽNÉHO MAGNETU	28 040,00
28 040,00
28 040,00 ’ 	 !	“■■■'				r			
kus	‘	1,000	77 040,00	77	040,00
_	_	1,000_
kus	-1,000	49 000,00	-49	000,00	
D. 1.1.13_Tab u I ka_oke n ních_a_dveřn ích_výp In í
" ozn. 21/P"-1,000	-1,000
Součet	-1,000
Kinosál-únikové dveře na fasádě

12

Datum:	25.09.2023

Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice___2.etapa
Místo: Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice	Projektant:
Zhotovitel	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem
d PSV	Práce a dodávky PSV
d 766	Konstrukce truhlářské				-46 047,83
-46 047,83
-46 047,83	
939; K	76666.12	Dveře dřevěné ozn. 12 1800x2100 mm; repase stávajících i dřevěných ( masiv dub ) dvoukřídlých dveře s profilací s i dřevěnými atyp. madly včetně repase podlahového ;samozavírače, osazení panikového madla na obou křídlech Včetně případných úprav dveří, zámek v	i i
i
kus j
i
i	-1,000	i
46 000,00:	-46 000,00	
w v v		D.1.1.13_Tabulka__okenních_a_civeřních_výplní " ozn. 12" -1,000
Součet		-1,000
-1,000			
995 K	998766104	i Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený iz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní ; vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,024	1 330,00
!		 . 					-31,92	

996 K 998766181
'Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
iz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za i přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv i výšku objektu
0,024	663,00 i
-15,91

		Spisovna SčF - stavební úpravy			
	Rekonstrukce foyer OK Teplice_2.etapa			14	
	MEjďvů némůstl 2S50, Topiko	Jj	ikjíh	07.09.2023	
		Dům Kultury Teplice iR.Constructíon s.r.o.				
. ..■PC”	Typ ■ ; Kód . ■.	Popis-■'	” .. MJ	■MnatíM. .	J.CůnalCZK]	Cenacclknm[CZKj	
Náklady soupisu celkem				128 251,23	
	0 HSV	Práce a dodávky HSV			31 338,26	
	0	6	Úpravy povrchů, codlahy a osazováni výplní			5B 779,85	
j 1161	i k letiiz-i mo	T"r"	i	|
| Zatřeni spár vápennou maltou vnllfn leh slropů z cihel	। m2	0.7301	162.001	118,56	
	-	Povybourftnl .iHCfry
;3 .Sk1?4! ^.200'1	CrJ^ o.rsc			
|	1162	i K |ei1131121	| PcnetraCnl disperzní nátěr vnllín leh stropů nanáianý ručné | mí	33,4201	91.20 |	3 321,50	
		WíHlS/í li	10.428			
'	1163	i. K |61212HOO	i Zatřeni spár vápennou maltou vnitřních stán z cthel	| mí	1.1601	122,00:'	141,52	
		wřQiJCini přidkv ^^□rjTr,7í]^r3 Siřící	: Ukl			
I 1164	: K Í612131121	iPanetračnl disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | rn2	107,3251	72,10^	7 759,76	
I 1165	| K 1612142001	1 Potaženi vnitřních stěn sklovlůknitým pletivem vtlačeným do i 1 tenxovrstvé hmotv	107,625!	266.001	28 628,25	
|	1166	I K ;61Z311131	1 Potaženi vnitřních stěn vápenným Stukem tlcuůlky do 3 mm | m2	107,625:	171.00!	10403.88	
1167	1 K 1632451103	j Potěr cementový samonivelačnl 2e suchých směsí tloušťky I - Ipřw 5 do 10 rmi	0.730 i	521,00;	406,30	
	—• ; 	  .	. . .	V-^iro/jfcu				
		Souto	8.7			
|	1í6
49	O 9 	 	
| K ;86203H33
i K 560072455	_ Ostatní kg nstrukce, a práce, bou rán 1	   _
I Bouráni přítok z cihel, tvárnic nebo přlfikovekz cihel
| půlených, plných něho dutých na maltu vápennou nebo	i m2
| vapcnocementcvou, ti. do 150 mm	j
npolriná přiCkn Ltt|>itil«l1J i 3la^!lS ^tiervc-u
’ Cic&očot ůlvcrú
•Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zánibnl, [
i vrat, stán, oslénl nebo obkladů dveřních zhrubni, plochy do 2 ! m2	।	9,734'.
11 810
í	1.576 ‘	145.001
369.00 i		11.012.17
1 440.63
5S1.54	
1159	i K Í977211121	|m2						
' " ' O	1 š™	I
| Řezáni slénovou pilou Kel z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm : m	í.5pT
5.8D0'	1 550.001	5 996,00	
		Strjíd	li			
;	1160
174
।	175
178	.			
' K '997013212
K '997013501
K ^997013509
K :997013603	Přesun suté_ _	_. 	 .__.	.. 	 _..		
| Vnltrostavenlíln I doprava suli a vybouraných hmot pro
;budovyvptesSdoSmračné	_	 .....		«	
: Odvoz suli a vybouraných hmat ne skládku nebo	1 t
írneásklůtiku se složením, na vzdálenost do 1 km
: Odvez suli a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskiádku ca sležením, na vzdálenost Při plátek k ctný za : i :ksždýda&l i započatý 1 km ptes i km	'
Zjisti	►Ui-rt*- v-^it.iCriLriH iLHr£itvl
' Poplatek za uložení stavebního od pádu na skládce
; (skládkavné) cihelného zatříděného do Kolátoru odpadů pod I i ;kódem_l701 02	 _			2,768'
2.760.
16,608
“	■iE.ft'Í'3
_	_	_
Í	2.768	1 630,00!
324,00 i
14,20'
1 460,00.			9 .68528
4 511.04
896.83
235,83
4 041,28	
	p 998	Přesun hmot			. .5. 660.48	
।	180	K 1998018003	i přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu I ; a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní ; vzdálenost do 10D m pro budovy s jakoukoliv nosnou .konstrukcí výiky přes 12 do 24 m	;	0,959	1 940,00	1 860,46	
	□ PSV	Práce a dodávky PSV			46 912,97	

Dokončovací práce - malby a tapety

		Zázemí KS-změna šířky dveří+doplnění magnetů EPS			
Stavba:	Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa			16	
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice		atum:	25.09.2023	
Zadavatel: Z hotovi tok		Dům Kultury Teplice
IR.Construction s.r.o.	Z	rojektant oracovat-eř		
	PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] |	
Náklady soupisu celkem			14 254,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV			14 254,00	
D	766		Konstrukce truhlářské		i'"'		14 254,00	
1169 , K	i
76666,59	'Dveře ozn.31/P, 1600/2100mm,EW30DP3/C2/Koo/Panik- i
: dřevěné,dvoukřídlé, plné.otevíravé RAL 7005, zárubeň ocel, . !RAL 7005, bezprahové, paniková hrazda, kluzná lišta,	|
i napojení na EPS, přídržný magnet	i
1,000!	90 254,00 i	90 254,00	
'■ /v		Poznámka k položce
požadovaná změna dle knihy změn 29.8,2023
_ 1	1,000			
958 . K	76666.31	'Dveře ozn. 31 /P 1600x2100 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE íOTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO
■SDK PŘÍČKY TL. 125 MM EW 30DP3/C2/PANIK KLIKA - , kus iPANIKOVÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ
|! S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ	-1,000	76 000,00	-76 000,00	
		D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dverních_výplní
” ozn. 31/P"-1,000
Součet	-1.000
-1,000			

Dopočet demontáže svítidel, stávajících rozvaděčů	
Stavba:	44
Datum:	25.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:	
Místo:
Zad a vater Zhotovfel:	Rekonstrukce	> foyer DK Teplice__2.etapa
Mírové náměstí 2950, Teplice
Dům Kultury Teplice IR.Construction s.r.o.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					56 765,14	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				416,54	
	D	997	Přesun sutě				416,54	
'	170	: K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	0,226	165,00 i	37,29	
171	K	'997013211	ÍVnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6m	. :	t	i	0,226	928,00	209,73	
174	I K	: 997013501
i	 _	. ..	! Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,226	324,001	73,22	
175	■ K	1		
■997013509	i Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
■každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,356	14,20.	19,26	
	vv
uv		0,226*6 "Přepočtené koeficientem množství
Součet		1,356
1,356			
183	: K	; 997013813	; Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	i	t	0,026.	2 940,00	76,44	
187	K	199701389. R1	: Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,200	3,00	0,60	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 520,60	
1174	D
K	741
i741211813	Elektroinstalace - silnoproud _
■Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do ! IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	'	10,000'	285,00	8 520,60
2 850,00	

1.PP
”m ístnost č, 23-chodba’' 3	3,000
1.NP
''místnost Č. 139-kalinka” 4	4,000
4.NP
"chodba u výtahových šachet" 3	3,000
Součet	10,000
í 1175	: K 741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	33,000 ■	88,20	2 910,60	
1176	K 741322855	Demontáž jistič tří pólový nn do 25 A ze skříně	kus	12,000	230,00	2 760,00	

	D M	Práce a dodávky M	47 828,00	
	D 21-M	Elektromontáže				47 828,00	
1177	■ r '					 '
K 218202003
i :	I
! Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního závěsného na oku přes 10 kg	i	|
i kus ;
]			L		48,000	294,00
I	14 112,00	
	v V	"místnost č. 1.01” 14		14,000			
	W	"místnost č. 1.02" 2		2,000			
	vv	"místnost Č. 1.03" 2		2,000			
	v v	"místnost č, 1.04” 2		2,000			
	vy	"místnost č. 1.05" 3		3,000			
	w	"místnost č. 1,06" 2		2,000			
	vv	"místnost č. 1.07" 2		2,000			
		"místnost č. 1.08" 3		3,000			
	w	"místnost Č. 1.09" 6		6,000			
	W	"místnost č. 1.10" 12		12,000			
	v V	Součet ~	_		48,000			
1178	. K 218202023	1 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo i venkovního stropního závěsného na oku do 10 kg	kus	16,000;	244,00	3 904,00	
	w	"místnost-kaocelář filharmonie" 6		6,000			
	v V	"mistnost-kancelář filharmonie" 4		4,000			
		"místnost-chodba filharmonie" 4		4,000			
		"místnost-sklad filharmonie’’ 2		2,000			
	w	Součet		16,000			
1179	i
. K 218203403	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem	kus	116,000	257,00 i	29 812,00	
	w	"místnost č. 04" 21		21,000			
	w	"místnost č. 17" 8		8,000			
	vv	"místnost č. 21" 4		4,000			
		"místnost č. 24" 1		1,000			
	w	"místnost č. 25" 2		2,000			
	VV	"místnost Č. 26” 2		2,000			
	w	"místnost č. 27" 1		1.000			
	w	"místnost č. 31" 2		2,000			
	w	"místnost č. 32" 2		2,000			
		"místnost č. 112" 4		4,000			
	v v	"místnost č. 126" 1		1,000			
	w	"místnost č. 128” 1		1,000			
	w	"místnost č. 130" 5		5,000			

Vzduchotechnika-doplnění, úprava, zařízení č.3,14,18, KINO
Stavba:	46
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice	Datum:	25.09.2023
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice	Projektant:
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					292 543,20	
	D	HSV	HSV				227 269,70	
	D	751.30	Zařízení č. 30 KINO-vestavba únikové cesty z kinosálu+kolize přechodu ve zdi			230 216,00	
3001	: M	,751.30.1.1	| požární klapka 1000x250/375-40, servo	kus	i	4,000 •	16 262,00 i	65 048,00 i	
: 3002	; M	! 751.30.1.2	tlumič hluku kulisa 100/250x 1000	■	kus	40,000 i	850,00 I	34 000,00	
3003	: M	,751.30.1.3	\ potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech Trouba 200x250/1000	kus	4,000 \	3 996,00 :	15 984,00	
3004	' M	751.30.1.4	! potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech přechod 2000x250- 1000x250/1000	/	kus	4,000	2 820,00	11 280,00	
3005	: M	751.30.1.5	potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech, oblouk 1000x250-30/200	kus	2,000	2 820,00'	5 640,00	
■ 3006	M	751.30.1.6	potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech, oblouk 1000x250-15/200	kus	2,000	2 538,00 :	5 076,00	
3007	M	.751.30.1.7	\potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech, trouba 1000x250/500+vs	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	
3008	M	751.30.1.8	,potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech Trouba 1000x250/1000+vs ,	kus	2,000 .	2 220,00	4 440,00	
i 3009	M	.751.30.1.9	i plech 100x250	kus	4,000	1 170,00	4 680,00	

i 3010	M	751.30.1.10	rámeček 100x250
„ .	........ 					. .. । .	kus |	2,000’	624,00	1 248,00 \	
808	ÍJL	751.20.3a	Montáž tepelné izolace	m2		22,000	350,00	7 700,00 i	
	w v v		Poznámka k položce cena dle SOD 22			22,000			
! 859	M
I	751.24.Tla	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci ve strojovně VZT na střeše - odolnost El 60DP1	.	m2		22,000 \	450,00	9 900,00 ;
i
I	
			Poznámka k položce cena dle SOD 22			22,000			
j 860	. M	i
751.OST.1.1	i těsnící, spojovací a montážní materiál	;	kus i		1,000	5 880,00	5 880,00	
861	K	751.OST.2.1	Montáž zařízení celkem	kus		1,000^	50 820,00	50 820,00	
; 862	. K	i751.OST.3.1	Doprava	kus ■		1,000 i	4 860,00	4 860,00	
í 863	! K	751.OST.4.1
L 	. 		 ...	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy	kus
		_.L .. .		1,000	1 440,00	1 440,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-2 946,30	
128	K	r			
Í96305111.R1	i	 i
;Vybourání podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo
:moniérovém rabičovém nebo z pletiva keramid
D.1.1.9a_Výřez_púdorysu_4.NP_bourací_práce
-6,900
Mezisoučet" 4.NP
Součet	m2		-6,900
-6,900
-6,900
-6,900	427,00	-2 946,30	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					65 273,50	
i 743	D
■ M	751.14
i 751.14.14.1	Zařízení č. 14 - Koncertní sál
Požární klapka PKTM 90-Č 500x400/375 -.40 TPM 018/1 i (servo	kus		-2,000	8 400,00	39 147,00
-16 800,00	
745	M	'751.14.14.3	Poznámka k položce
cena dle SOD
skutečnost
-2
i Požární klapka PKTM 90-C 315x400/375-.40 TPM 018/1
(servo	kus		-2,000
2,000 '	7 450,00	14 900,00	
	v'V		Poznámka k položce cena dle SOD skutečnost						

	2	2,000	
r"	
! 749
i	_	M	751.14.14.13	\ Potrubí čtyřhranné sk.l pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs	i	i,ooo\	1 570,00		i
1 570,00'	
			Nové umístění požárních klapek-požárni klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1,000				
2010	M	751.14.14.28	oblouk 500x400-90	kus	4,000	2 030,00		8 120,00;	
			Nové umístění požárních klapek-požární klapku neíze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
4		4,000				
I ' " ” '
: 2011	M	751.14.14.29	^potrubí čtyřhranné Sk.l Pz plech Trouba 500x400/1500	i kus	1,000 :
... „ 	 i ..	2 298,00	2 298,00;	
	vv
V v		Nové umístění požárních klapek-požární klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1.000				
| 2012	M	}751.14.14.30	I krček na potrubí s rámečkem 500x400-150	kus	1,000 I
1	1	314,00		314,00	
			Nové umístění požárních klapek-požárni klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1,000				
; 764
i		; M	[751.14.14.TI	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci El 60DP1	m2	;	34,100	450,00	15345,00.	
	w
w		Poznámka k položce
cena dle SOD
Nové umístění požárních klapek-požární klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
14
doízolace požární klapky 500x400-4ks, 310x400-2ks
20,10
Součet		14,000
20,100
34,100				
! 766	i K	751.14.14.3a	Montáž nového zařízení - elementy	kus	1,000	7 500,00:	7 500,00	
	vv		Nové umístěni požárních klapek-požární klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1,000				
' 765	K	751.14.14.3b	i Montáž nového zařízení - potrubí a izolace	kus	1,000	3 500,00		3 500,00.	
	W		Nové umístění požárních klapek-požární klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1,000				
767	K	1751.OST.3.2.15	Doprava	kus	1,000	2 400,00'	2 400,00'	
	w		Nové umístění požárních klapek-požární klapku nelze umístit do svislé ani vodorovné polohy z důvodu malého prostoru
1		1,000				

D 751.18	Zařízení č. 18 - Společenský klub	-720,00	
778	K 5751.18.1	Demontáž části stávajícího potrubí do obvodu 1500	m	-2,000	890,00	-1 780,00	
2000	K '751.18.1.C	Demontáže potrubí, rozřezání, zaslepení větve ve 4.NP	kpl	1,000	33 600,00	33 600,00:	
2001	K 751.18.1.d I	Odnesení potrubí, tlumičů hluku ze střechy ke kontejneru	kpl	.	1,000	33 600,00	33 600,00	
2002	K -751.18.1.6	Protipožární obklad záslepu	kpl	1,000	3 540,00	3 540,00:	
2003
L	M \751.18.1.f	montážní materíál-řezné koutouče	kus	;	20,000	120,00	2 400,00	
779
L	K |751.18.1a	Demontáž části stávajícího potrubí do obvodu 3500	m	'	-3,000	890,00	-2 670,00	
i 780	K 751.18.1b I	Demontáž části stávajícího potrubí a následná montáž do	m	।	-10,000	890,00	-8 900,00	
		obv. 3000					
■ 781	M [751.18.18.1	Požární klapka PKTM 90-C 1250x355/375 -.40 TPM 018/1 (serv	kus	-2,000	12 850,00	-25 700,00	
। 782	M .751.18.18.10	Potrubí Čtyřhranné sk.l pozínk.plech Trouba	kus	-1,000	1 980,00	-1 980,00	
		i 1000x355/1000+ vs			     —	—			
783	j M [751.18.18.11	'.Potrubí čtyřhranné sk.l pozínk.plech Trouba 1250x355/200	kus	-1,000	980,00	-980,00
i	
, 784
I		; M '751.18.18.12	L...	      —	—		 ....
''Potrubíčtyřhranné sk.lpozínk.plech Trouba
[1250x355/1000+vs	kus	-1,000	2 450,00	-2 450,00 i	
j 785	M ,751.18.18.13	■ Potrubí čtyřhranné sk.l pozínk.plech Trouba 1250x355/200	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	
; 786	: M [751.18.18.14	' Potrubí čtyřhranné sk.l pozínk.plech Trouba 1250x355/1000+ vs	kus	-1,000	2 450,00	-2 450,00	
; 787	: M .751.18.18.TI	.Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně	m2	-6,000	450,00	-2 700,00	
		i dělící konstrukci El 60DP1					
; 788	; K 751.18.3a	i Montáž nového zařízení - elementy	kus	-1,000:	7 850,00	-7 850,00	
' 789	K 751.18.3b	Montáž nového zařízení - elementy	kus	-1,000	15 200,00	-15 200,00	
866	K 751.OST.3.2.19	i Doprava	kus	1,000	500,00	500,00	
790	K 751.OST.3.2.19	1 Doprava	kus	-1,000	500,00	-500,00	
	D 751.3	Zařízení č. 3 - Foyer						40 100,00	
633	: M 751.3.3.5	[požární klapka PKTM 90-C 560x280/375-.40 TPM 018/1	kus	4,000	8 100,00	32 400,00	
		'serv				.. .		 .			 				
	x/V	Poznámka k položce					
	w	cena dle SOD
chybné počty ve W oproti PD					
	w	4		4,000		

	653	K	751.3.3.3a	Montáž nového zařízení - elementy	kus	1,000!	7 200,00,	7 200,00	
	655	K	751 .OST.3.2.4	Doprava	i	kus	j	1,000 i	500,00		500,00	
		D	763	Konstrukce suché výstavby					-13 253,50	
	922	K	763231222	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě	i
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, výška konstrukce 135 mm, s izolací, El Z/S 30	m2	-6,900		-	|
1 850,00' i
			i_ 			-12 765,00	
		w		D.1.1,9_Pudorys_4.NP_nový_stav
-6,900 " m.č. 429
Mezisoučet" 4.NP
Součet		-6,900
-6,900
-6,900				
	934	K
i
i	1998763304
■i	-	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek	i
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky přes 24 do 36 m	,	t	j	-0,250	1 350,00		-337,50	
	. 935	K	998763381
i	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
;sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých neboj cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,250'	604,00		-151,00	

Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 14364
Datum vzniku a zápisu:
22.	září 1998		
Spisová značka:
C 14364 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsáno 22. září 1998
Obchodní firma:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. zapsáno 22, září 1998 vymazáno 1. července 2023 IR.Constructíon s.r.o. zapsáno 1. července 2023 Sídlo: Ústí nad Labem, Hrbovická 117/61, PSČ 40001 zapsáno 22. září 1998 vymazáno 14. října 2002		
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3122/52, PSČ 40001 zapsáno 28. prosince 2010 vymazáno 29. listopadu 2016	 Ústí nad Labem, Moskevská 1577/32, PSČ 40001 zapsáno 14. října 2002 vymazáno 28. prosince 2010
Veíká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem zapsáno 29. listopadu 2016 vymazáno 1. ledna 2022	 Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem zapsáno 1. ledna 2022
Identifikační čísio: 250 41 738 zapsáno 22. září 1998 Právní forma: Společnost s ručením omezeným zapsáno 22. září 1998 Předmět podnikání: podnikání v oblastí nakládání s odpady v režimu živností volných (neopravňuje k nakládání s nebezpečnými odpady) zapsáno 22, září 1998
vymazáno 28. prosince 2010
rekultlvační práce - obnova devastované krajiny po ukončení
průmyslových a jiných činností v režimu živností volných zapsáno 22, září 1998
vymazáno 28, prosince 2010							_____					
výroba kompostů, biomlnerálních a meiioračních hnojiv
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 28. prosince 2010				 					
koupě zboží za účeíem jeho dalšího prodeje a prodej zapsáno 22. září 1998
vymazáno 28. prosince 2010					
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 13. října 1998						
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 13. října 1998			______	
Činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 1. října 2001	_____	__	__			_____					_____		
realitní činnost zapsáno 6. září 2004
vymazáno 28. prosince 2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě zapsáno 6. září 2004 vymazáno 28. prosince 2010					
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy zapsáno 15. prosince 2004 vymazáno 28. prosince 2010													
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zapsáno 28. prosince 2010 vymazáno 1. ledna 2022							_____						
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti:
Poskytování siužeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Pěstitelské pálení
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenabraných nosičů údajů a záznamů
Výroba hnojiv
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslicské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
zapsáno 1. ledna 2022				
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 8. dubna 2011	 výkon zeměměřických činností
hornická činnost v rozsahu ustanovení § 2:
-	písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních de! a lomů,
-	písm. e) zřizování a provozování odvafů, výsypek a odkalíšť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), - písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
-	písm. i) důlně měrická činnost, zák. Č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
zapsáno 8. dubna 2011
geologické práce
zapsáno 8. července 2011 				
zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 5, března 2012						
revíze, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
zapsáno 1. ledna 2022
Statutární orgán:
Jednatel:
XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, 
XXXX X X XXXXX XXXX, PSČ XXXXX
zapsáno 22, září 1998
vymazáno 29. května 2000			
Jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den vzniku funkce: 22. září 1998
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 30, dubna 2014
Jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den vzniku funkce: 22. září 1998
zapsáno 30. dubna 2014
vymazáno 1. listopadu 2019
Jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den vzniku funkce: 22. září 1998
zapsáno 1. listopadu 2019
Jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den zániku funkce: 11. prosince 2000
zapsáno 29. května 2000
vymazáno 4. května 2001				
Jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den vzniku funkce: 11. prosince 2000
Den zániku funkce: 16. září 2002
zapsáno 4. května 2001
vymazáno 14. října 2002		
jednatel:
XXX XXXXX XXXXX,
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX
Den vzniku funkce: 9. ledna 2023
zapsáno 9. ledna 2023	
Počet členů:
1 zapsáno 29, listopadu 2016 vymazáno 9. ledna 2023													
2
zapsáno 9. ledna 2023			
Způsob jednání:
Jednatelé za společnost podepisují tak, že k jejímu napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu přípoji svůj podpis.
Oba jednatelé jednají společně.
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 14, října 2002 		_____	
Jednatel jedná jménem společnosti a podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 14. října 2002
vymazáno 30. dubna 2014 											_____	
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 30. dubna 2014						
Dozorčí rada:
XXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 20. srpna 1999
XXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
zapsáno 22. září 1998 vymazáno 20. srpna 1999										______			
XXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
Den vzniku členství: 22. září 1999 Den zániku členství: 16. září 2002 zapsáno 22. září 1998 vymazáno 14, října 2002.
XXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
Den vzniku členství: 24. září 1999
Den zániku členství: 16. září 2002
zapsáno 20. srpna 1999
vymazáno 14. října 2002
xxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Den vzniku členství: 24. září 1999
Den zániku členství: 16. září 2002
zapsáno 20. srpna 1999
vymazáno 14. října 2002
Společníci:
Společník:
xxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 29. května 2000
Podíl:
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 29. května 2000
Společník:
RAVELspol. s r.o„ IČ: 472 82 312
Ústí nad Labem, Hrbovická 117/61, PSČ 40001
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 29. května 2000
Podíl:
Vklad: 60 000,- Kč
Splaceno: 60 000,- Kč
zapsáno 22. září 1998
vymazáno 29. května 2000
Společník:
RAVEL spoj, s r.o., IČ: 472 82 312
Ústí nad Labem, Hrbovická 117/61, PSČ 40001
výše obchodního podílu 40 %
zapsáno 29. května 2000
vymazáno 14. října 2002
Podíl:
Vkiad: 80 000,- Kč
Splaceno: 80 000,- Kč zapsáno 29, května 2000 vymazáno 14. října 2002
Společník:
REKULTIVACÍM! VÝSTAVBA Most, a,s„ IČ: 445 69 769
Most, Dvořákova 2165, PSC 43401
výše obchodního podílu 35 % zapsáno 22. září 1998 vymazáno 14. října 2002
Podíl:
Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 70 000,- Kč zapsáno 22, záři 1998 vymazáno 14, října 2002
Společník:
RVM-SERVICE a.s„ IČ: 640^50 114
Most, Budovatelů 2830, PSČ 43401
výše obchodního podílu 25 % zapsáno 22. září 1998 vymazáno 14, října 2002
Podíl:
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 OOP,- Kč zapsáno 22. září 1998 vymazáno 14, října 2002
Společník:
xxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
zapsáno 14. října 2002 vymazáno 30. dubna 2014
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno; 100%
Obchodní podíl: 100 % zapsáno 14. října 2002 vymazáno 30. dubna 2014
Společník:
xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
zapsáno 30. dubna 2014
vymazáno 1. listopadu 2019
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: není zapsáno 30. dubna 2014 vymazáno 1. listopadu 2019												
Společník:
xxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
zapsáno 1. listopadu 2019														
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není
zapsáno 1. listopadu 2019
vymazáno 1. ledna 2022												
Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní podíl č. 1
zapsáno 1. ledna 2022			
Základní kapitál:
200 000,- KČ zapsáno 22, září 1998	
Ostatní skutečnosti:
Zapisuje se změna čL VI. společenské smlouvy ze dne 24.6.1999.
zapsáno 20. srpna 1999
vymazáno 29. listopadu 2016									__
Počet členu statutárního orgánu: 1
zapsáno 30. dubna 2014
vymazáno 29. listopadu 2016		
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zapsáno 30, dubna 2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, vyhotoveného dne 4.12.2018 k rozhodnému dní 1.10.2018 a schváleného dne 15.1.2019, došlo u společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na novou nástupnickou společnost Žižkova 3605 s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Žižkova 3605/161, PSČ 400 01, (IČ:) 07807180.
zapsáno 16. ledna 2019								
Společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 25041738, oznamuje, že do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364 byl uložen Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nových společností.
zapsáno 1. července 2020
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, vyhotoveného dne 30.6.2020 k rozhodnému dni 1.1.2020 a schváleného dne 10.8.2020, došlo u společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných části jmění na nové nástupnické společnosti
-REKLUX s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418326
-REKPOZ s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418334
-REKPRA s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418342
-REKUL s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418351
zapsáno 15. srpna 2020	 Seznam společníků a výpis z něj vyžaduje úředně ověřený podpis jednatele společnosti, zapsáno 1. ledna 2022		
Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného společníka, nevyžaduje-li zákon nebo zakladatelský dokument dokonce sepsání notářského zápisu. Zakladatelský dokument vyžaduje sepsání notářského zápisu o rozhodnutí o jmenování a odvolání jednatele společnosti a udělení souhlasu s převodem podílu. Plná moc k učinění rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného společníka. Zápis z valné hromady vyžaduje úředně (a to výlučně notářsky) ověřený podpis předsedy valné hromady a zapisovatele, nevyžaduje-li zákon nebo zakladatelský dokument dokonce sepsání notářského zápisu, zapsáno 1. ledna 2022
vymazáno 9. ledna 2023	 Zakladatelský dokument vyžaduje sepsání notářského zápisu o rozhodnutí o jmenování a odvolání jednatele společnosti a udělení souhlasu s převodem podílu. Plná moc k učinění rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného společníka. Zápis z valné hromady vyžaduje úředně (a to výlučně notářsky) ověřený podpis předsedy valné hromady a zapisovatele, nevyžaduje-li zákon nebo zakladatelský dokument dokonce sepsání notářského zápisu, zapsáno 9. (edna 2023
Společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 25041738 oznamuje, že do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364, 646, 45754, 49819, 45755, 18593, 1846, 49820, 18873 byl uložen Projekt přeměny: a/ rozdělení formou odštěpení sloučením - REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 41327331 jako rozdělovanými společnostmi a REKPRA s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 Ol Ústí nad Labem, (IČ:) 09418342, REKUL s.r.o, se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 09418351, Noeta a.s. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 27341950, ERVE s.r.o. se sídlem Veiká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem- centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 25450051 a Nové Stříbrníky s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 25441957, REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a Vlila Maternus s.r.o. se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 17829577 jako nástupnickými společnostmi
b/ rozdělení formou odštěpení se vznikem nových společností - REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a I S T A R , spoíečnost s ručením omezeným (spol. s r,o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 41327331 jako rozdělovanými společnostmi
c/ fúze sloučením REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o, jako nástupnickou společností a I R Construction s.r.o. se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 17829585, jako zanikající společností
zapsáno 1, května 2023	
Dle projektu přeměny vyhotoveného dne 25,4,2023 k rozhodnému dni 1.1,2023 a schváleného dne 24,6.2023 se:
1/ společnost I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, (IČ:) 41327331 rozdělila a část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost IR.Construction s.r.o. (povodně REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 25041738 jako společnost nástupnickou
2/ společnost IR.Construction s.r.o. (původně REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, identifikační
číslo (IČ:) 25041738:
A/ rozdělila a:
a/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost REKPRA s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 09418342 jako společnost nástupnickou
b/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost REKUL s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 09418351 jako společnost nástupnickou
c/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost Noeta a.s, se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Identifikační číslo (IČ:) 27341950 jako společnost nástupnickou
d/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost ERVE s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Identifikační číslo (IČ:) 25450051 jako společnost nástupnickou
e/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost Nové Stříbrníky s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, Identifikační číslo (IČ:) 25441957 jako společnost nástupnickou
f/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost RV DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471998 jako společnost nástupnickou
g/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost RV INVEST s.r.o, se sídlem Ibsenova 1207/3, 120 00 Praha 2 Vinohrady, identifikační číslo (IČ:) 19471882 jako společnost nástupnickou
h/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REKLIN s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471891 jako společnost nástupnickou
i/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost Matěchova 7 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471904 jako společnost nástupnickou
j/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost LASTA POZEMKY s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471912 jako společnost nástupnickou
k/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost Zahrada Střekov s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400
01 Ústí nad Labem, identifikační čisto (IČ:) 19471921 jako společnost nástupnickou
1/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společností) přešla na společnost REK 1 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471939 jako společnost nástupnickou
m/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REK 2 s.r.o.se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471947 jako společnost nástupnickou
n/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REK 3 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační Číslo (IČ:) 19471955 jako společnost nástupnickou
o/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REK 4 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471963 jako společnost nástupnickou
p/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REK 5 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 19471971 jako společnost nástupnickou
q/ Část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost REK 6 s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační Čísfo (IČ:) 19471980 jako společnost nástupnickou
B/jako společnost nástupnická sloučila se společností I R Constructíon s.r.o. se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, identifikační číslo (IČ:) 17829585 jako společností zanikající a přešlo na ní jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti zapsáno 1. července 2023
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ťhttp.7/www.1ustíce.cz).
Dne: 4.10.2023 10:58
Údaje platné ke dni 4.10.2023 03:56