DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	VZ/22/A/3
Číslo smlouvy zhotovitele:	2300002
(dále jen „dodatek")
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ"), mezi následujícími smluvními
stranami:
Článek I
Smluvní strany

zastoupený:

Daniel Přibyl, jednatel

Objednatel:	Dům Kultury Teplice	
           se sídlem:	Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice	
IČO;	00081221	
DIČ:	CZ00081221	
telefon:	417 515 921	
bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka Teplice 533501/0100	
zastoupený:
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice
Ing. Přemysl Šoba	
ve věcech technických: stavební dozor:	Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxx. Xxxxx Xxxxxx	

Zhotovitel :	IR.Construction s.r.o.
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu spisová značka C14364	
se sídlem:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem	
kontaktní adresa:
IČO:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 25041738	
DIČ:	CZ25041738	
telefon:	+420 xxx xxx xxx	
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	
číslo účtu:	289387719/0300	
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, jednatel
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, jednatel
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx,, jednatel typu B
Xxx Xxxxx Xxxxxxx,, jednatel typu B
ve věcech technických: Xxxxx Xxxxx, technický a provozní ředitel
Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 25. 4 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa". V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Současně dochází k posunutí termínu dokončení realizace.
2.2.	Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.
Článek III
Vícepráce
3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek IV
Méněpráce
4.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 768 319,44 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.
Článek VI
Cena díla
6.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	      71	298 043,73 Kč
Cena za vícepráce bez DPH 		         768	319,44 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2	..	  72	066 363,17 Kč
DPH (21 %) dle dodatku č. 1	        14	972 589,19 Kč
DPH (21 %) za vícepráce			     161	347,08 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2
15 133 936,27 Kč
Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 1						
Cena za vícepráce včetně DPH							
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2,
86 270 632,92 Kč 	 929 666,52 Kč
87 200 299,44 Kč
Článek VII
Změna termínu dokončení
7.1	V dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023 bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 27. 12. 2023. Vzhledem k situaci, že jednotlivá zpoždění nebylo možné realizovat souběžně, je celkový posun dokončení díla o 35 dnů dán prostým součtem jednotlivých časových posunů. Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 6.2 Termín dokončení prací: do 31. 1. 2024.
7.2	Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku změnový list č. 2.
Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
8.2	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8.3	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
8.4	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8.6	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0928/23 ze dne 24. 11.
2023. Přílohy:
1)	Změnový list č. 2
2)	Výpis z obchodního rejstříku
V Teplicích, dne ....
v Ústí nad Labem, dne
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ing. Přemysl Soba
Ředitel DK Teplice
Daniel Přibyl
Jednatel společnosti
Ing. Karel Složil
Jednatel společnosti

OBJEDNATEL:
Dům kultury Teplice Mírové námůsll 2950 415 01 Teplice

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt:
Část:
Název:
ZL č.:
Datum vystavení:
Podklady:

Rekonstrukce foyer DK Tepllce_2.etapa Archltektonlcko-stavebnl řešení Změny stavby, posun termínu 02
30.10,2023
DSP

Popis změny:	Změnový list obsahuje vyčíslení změny rozsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace, požadavky objednatele na změny nebo doplnění a zohledňují také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výměr.	
Zdůvodnění změny:	Při realizaci stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o požadavky objednatele a zohlednit rozdíly mezi PD a výkazem výměr. Jednotlivé zrněny jsou zpracovány formou dílčích rozpočtů a Jsou součásti tolioto Změnového listu.
V tomto Zl se Jedná o následující práce a dodávky:	
	3 Zázemí KS - úprava stávající SDK příčky	
	7 Režie KS - doplnění protipožárních dveří	
		17 Výměna dveří do m.č. 239	
		18 Doplnění dveří mezi m.č. 230 a 231a	
	20 Výtah - úprava řízení provozu výtahu	
	45 Nebude bourán mramor v prostoru bývalé vrátnice	
	59 Nebudou realizovány kazetové podhledy v mč. 107 a 108	
	71 Zadní stěna recepce nebude z pórobetonu	
	92 Protipožární nástřik ocelových konstrukcí	
	99 Bourací práce nutné pro rozvody VZT	
	106 Prostorové lešení pro montážní práce	
	108 Bourání schodišťových ramen železobetonových	
			09 Doplnění chybějících profilů U300 ve výtahové šachtě	
			
	Výše popsané změny byly projednány v rámci aktuálního řešeni průběhu stavby v průběhu kontrolních dnů, případně vyplynuly z upřesnění technického a architektonického řešení tak, Jak bylo předmětem DPS a architektonické studie, případně požadavky objednatele.	

Počet příloh:

ZHOTOVITEL:
IR.Constructlon s.r.o. Drážďanská 856/74B 400 07 Ústi nad Labem

Cenový dopad (Je-ll nějaký):	Přípočty;	Odpočty:	Celkem za změnu:	
bez DPH	1306 227,40 Kč	-537 907,96 Kč	768 319,44 Kč	
DPH 21%	274 307,75 Kč	-112 960,67 Kč	161347,08 Kč	
vč. DPH	1580 535,15 Kč	-650 868,63 Kč	929 666,52 Kč	
Časový dopad (Je-ll nějaký):	ANO	r 16 dnů - za práce nad rámec projektové dokumentace + zjištěný rozpor mezi PD a skutečnosti u bouracích prací schodiště
Celkový dopad do termínu je 16 dnů = termín dokončení díla se posouvá na 12.01.2024.	
Dopad do standartu (je-ll nějaký):	NENÍ		
Dopad do změny PD (je-ti nějaký):	ANO	zjištěné změny nají dopad do PD, shrnutí zrněn bude obsaženo v DSPS	
Dopad na smluvní milníky (je-ll nějaký):	NE		
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU		

Vystavil:
Xxxxx Xxxxxx
(ZHOTOVITEL)
Ověřil:
Xxx Xxxxx Xxxxxx
(TDS)
Ověřil:
Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (PROJEKTANT)
schválil:
Ing. Přemysl šoba (OBJEDNATEL)
Datum: 30.10,2023
Datum: 30,10.2023
Datum: 30,10.2023
Datum: 30,10.2023

768 319,44 Kč

DPH

Změnové rozpočty s výkazem výměr pro ZL č. 2/2023
Stavba:	Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa	
Objednavatel:	Dům Kultury Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem	
TDI:	Ing. Xxxxx Xxxxxx	
i

poř.číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH	
3	Zázemí KS - úprava stávající SDK příčky	0.00	76 645,41	76 645,41	
7	Režie KS - doplnění protipožárních dveří	0,00	33 938,92	33 938,92	
17	Výměna dveří do m.č. 239	0.00	35 512,40	35 512,40	
18	Doplnění dveří mezi m.č. 230 a 231a	0,00	16 777,55	16 777,55	
20	Výtah - úprava řízení provozu výtahu	0,00	3 250,00	3 250,00	
45	Nebude bourán mramor v prostoru bývalé vrátnice	-8 609.28	0,00	-8 609,28	
59	Nebudou realizovány kazetové podhledy v mč. 107 a 108	-410 550.00	273 266,03	-137 283,97	
71	Zadní stěna recepce nebude z pórobetonu	-71 134.18	74 082,95	2 948,77	
92	Protipožární nástřik ocelových konstrukcí	0.00	86 308,40	86 308,40	
99	Bourací práce nutné pro rozvody VZT	0.00	115 359,15	115 359,15	
106	Prostorové lešení pro montážní práce	: t	46 939,04	46 939,04	
108	Bourání schodišťových ramen železobetonových	-47 614,50	350 291,18	302 676,68	
109	Doplnění chybějících profilů U300 ve výtahové šachtě	0,00	193 856,37	193 856,37	
Celkem		T CirV 2 2	1 306 227,40	768 319,44	
Cena bez DPH

Cena s DPH	v CZK	929 667 Kč	
základní
snížená
21.00%
15.00%
768 319.44
0,00
929 666.52
0,00

Zázemí KS - úprava stávající SDK příčky
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Datum:	25.10.2023
Projektant
Zpracovatel:

Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					76 645,41	
D PSV	Práce a dodávky PSV					76 645,41	
D 741	Elektroinstalace - silnoproud					73 059,50	
2000 | M |po/236	| Vykružení otvoru pro vypínač, vytaženi vypínače, kabelové propojení	sada	4,000	650,00	2 600,00	

D 763	Konstrukce suché výstavby	0,00
2000	K	763164518	SDK obklad kcí (varu L š do 0,4 m desky 2xDF 15	m	10,230	766,00	7 836,18	
2000	K	763221243	Sádrovláknitá stěna předsazená I1105 mm CW+UW 75 desky 2x15 s izolací El 90 Rw do 45 dB	m2	39,893	1 480,00	59 041,64	
934	K	998763304	cemenlovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	1,833	1 350,00	2 474,55	
935	K	998763381	i iuouii niiivt piv rxvnouurxw 11 iui uuvai ic z. ucocn oaui ur\ai lvi ivvjrvi i, oaui Wicmi my vi i, cemenlovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 	„1		;_i,-..i,-.i;,. . .AXi,..				t	1,833	604,00	1 107,13	

D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 585,91
1125	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah	m2	59,255	5,69	337,16	
1126	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	62,218	2,46	153,06	
1127	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,341	18,30	884,64	
1129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	59,255	3,05	180,73	
1130	K	784221101	Malby z malířských směsí otéruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,341	42,00	2 030,32	

Režie KS - doplnění protipožárních dveří
Stavba
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:		Mírové náměstí 2950, Teplice			Datum:	25.10.2023	
Zadavatel:		Dům Kultury Teplice			Projektant:		
Zhotovitel		IR.Construction s.r.o.			Zpracovatel:		
PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				33 938,92	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 731,09	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				577,22	
2000	K 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	11,780	49,00	577,22	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99,03	
142	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,593	167,00	99,03	
	D	96	Bouráni konstrukci				1 054,84	
49	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	369,00	581,54	
60	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,152	928,00	141,06	
62	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,128	14,20	30,22	
61	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,152	457,00	69,46	
63	K	997013631.01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,152	1 530,00	232,56	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 207,83	
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 207,83	
2000	K	76666.62	Dveře ozn.XI 800/1970mm EW30DP3/C2/Sm/Panik dřevěné,jednokřídlé,plné, oteviravé, RAL 7005,ocel.zárubeň RAL 7005, protihlukové, klika/klika, kluzná lišta	kus	1,000	32 160,00	32 160,00	
995	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,024	1 330,00	31,92	
996	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	663,00	15,91	

Výměna dveří do m.č. 239

č. 17

Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Datum 25.10.2023
Projektant
Zpracovatel:

Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel.	IR.Construction s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				35 512,40	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 104,57	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				950,70	
2001	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	19,402	49,00	950,70	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99,03	
142	K	967031132	Přisekání (špicováni) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,593	167,00	99,03	

D 96	Bourání konstrukcí	1 054,84
49	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2	m2	1,576	369,00	581,54	
60	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,152	928,00	141,06	
62	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,128	14,20	30,22	
61	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,152	457,00	69,46	
63	K	997013631.01	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,152	1 530,00	232,56	

33 407,83

d PSV Práce a dodávky PSV
o 766	Konstrukce truhlářské	33 407,83
2000	K	76666.60	L7VCIC V/Z-l I./XkJL OUU/ IC/í Vllllil l_VVUULJI U/t/Z. U 1 C V Cl IC ,JC VI1 1UÍM IU 10,^11 IC, MIC V 11 O V C , 1 \/~\L 7005,ocel.zárubeň RAL 7005, protihlukové, klika/klika, kluzná lišta, samozavírač,	kus	1,000	33 360,00	33 360,00	
995	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,024	1 330,00	31,92	
996	K	998766181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,024	663,00	15,91	

Doplnění dveří mezi m.č. 230 a 231a

Stavba

č. 18

Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Datum:	25.10.2023

Projektant
Zpracovatel

Místo' Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel	IR.Construction s.r.o.

11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,487	1 630,00	793,81	
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,487	324,00	157,79	
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,922	14,20	41,49	
178	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02			t	0,487	1 460,00	711,02	

1 704,11

Přesun sutě

89,24

Přesun hmot

D 998

D 997

188	K	

Irtusuii i ti i ivrpi u uuuuvy uumoiioixg vyoiavuy, m/uioiii, vyt umu q oiuz.uy i uvili - Met	i i icuHai hť-ciUc
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12

0,04e[

1 940,00

89,24

*	, ■	—	111	14 * i f	J.cena
PC Typ	Kod	Popis	MJ Množství rr7l/.	Cena celkem ICZK]	
Náklady soupisu celkem
d	HSV	Práce a dodávky HSV
d	3	Svislé a kompletní konstrukce	16 777,55
4 488,99
1 620,00	
26	K	317141423	i i eniauj ^ÍMMI Iv pi vičiOi irxuVUt iC L. puiuuoiuiiu uaoz.ci ic uu iciirxciiu liianuvciio iulu, vucuig oig^giii dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky	kus	2,000	810,00	1 620,00	
258,10

72	K	612142001	Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,580	266,00	154,28	
73	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	0,580	179,00	103,82	
a osazování výi
D 6

148	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,600	148,00	236,80	
142	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,711	167,00	118,74	
1131	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	231,00	462,00	
817,54
Ostatní konstrukce a
>, bourání
D 9

12 288,56

d PSV Práce a dodávky PSV
907	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
910	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	
934	K	998763304	i i coul i i ii 11vt riu r\vi toii unce i nvi nuvaiic z- uuodi\ čictUi Utvoi ivi iwy vi i, oavi uviaru my mi l, cemenlovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t	0,015	1 350,00	20,25	
935	K	998763381	cemenlovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití	t	0,015	604,00	9,06	
3 459,31
763
D
Konstrukce suché vý;

D	766	Konstrukce truhlářské	6 012,79	
260	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelově zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	797,00	797,00	
262	M	61164005	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
265	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	112,00	112,00	
267	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	1,000	206.00	206,00	
269	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	180,00	180,00	
270	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	6,000	193,00	1 158,00	
995	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,030	1 330,00	39,90	
996	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	0,030	663,00	19,89	
D 783	Dokončovací práce - nátěry	297,88

331	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,948	71,00	67,31	
332	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometeni	m2	0,948	5,21	4,94	
333	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní	m2	0,948	117,00	110,92	
334	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,948	121,00	114,71	
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 518,58

1119	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,323	5,69	109,95	
1121	K	784111031	Omyti podkladu omyti v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,323	29,90	577,76	
1123	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,323	19,70	380,66	
1125	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	25,173	5,69	143,23	
1126	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m	m2	26,432	2,46	65,02	
1127	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,323	18,30	353,61	
1129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni malířských prací omytím podlah	m2	25,173	3,05	76,78	
1130	K	784221101	Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,323	42,00	811,57	

Výtah - úprava řízení provozu výtahu
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
č. 20
Misto:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Datum 25.10.2023
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód	Popis	• < ■	>	Cena celkem
MJ Množství J.cena [CZK] [CZK]	
Náklady soupisu celkem
d	PSV	Práce a dodávky PSV
D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad, zař. a váh		3 250,00
3 250,00
3 250,00	
1146	K	330. R1 a	Dodávka a montáž elektrického výtahu s pohomen v šachtě - úprava řízeni provozu výtahu	Kp.	1,000	3 250,00	3 250,00	
PoznámkaA položce
<vd zciuust our iwue nove itibiatuvdny vytait tidfjiugidniuvdti wn. ze tivuuuv w o ivr řt/uzne vystoupil uu uzamčeného prostoru chodby m.č. 305 Příslušně tlačítko na ovladači v kabině výtahu bude opatřeno

Nebude bourán maramor v prostoru bývalé vrátnice

č.45

Zadavatel:
Zhotovitel

Dům Kultury Teplice
IR.Construction s.r.o.

Projektant
Zpracovatel

Stavba
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Datum 25.10.2023

Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				-8 609,28	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-4 152,48	
46	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, leracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-25,320	164,00	-4 152,48	
	vv		(6-2,22)+(6'2)		-25,32			
	vv		Součet		-25,320			
	D	99	Přesun hmot				-4 456,80	
	K	998018001	mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	-3,714	1 200,00	-4 456,80	

Nebudou realizovány kazetové podhledy v mč. 107 a 108 (bude SDK podhled)
Č.59
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2,etapa
Misto:	Mírové náměstí 2950, Teplice	Datum	25.10.2023	
Zadavatel	Dům Kultury Teplice	Projektant	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKj	Cena celkem (CZK)	
Náklady soupisu celkem				-137 283,97	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-137 283,97	
239	K	767-05	i\oí.cluvy pvui ilcU UUk/AUUUAZ.uiitm ou orxiyiym laouciii, z.uvujcny oyoiciiiuvy i tuoi iy ivoi, povrchová úprava kazet: bílá FROST - nejbližší barevný vzorek nes je 0500n, obrazivost světla	m2	-117,300	3 500,00	-410 550,00	
	w		Přesný popis viz výkres D. 1.1.10.F					
	vv		"(05)" 117,30		-117,300			
	vv		Součet		117,300			
179	K	763231122.01	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5mm, zdvojený nosný rošt (dodávka+montáž)	m2	117,300	1 290,00	151 317,00	
	w		"připočet misto kazetového podhledu dle výkresu D 1.1.10.F" 117,30		117,300			
	vv		Součet		1 17,300			
180	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	117,300	270,00	31 671,00	
181	K	763131790	Korkový nástřik podhledu tl.5mm (dodávka+montáž)	m2	117,300	734,00	86 098,20	
182	K	998763301	r l coui i i o i iih pí o r\vi ion	iiiwi vai tc z.	3aOt unai ivi luvyui i, oavu v/viarxi niy^i i,
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	2,411	1 130,00	2 723,88	
	VV		117,3*0,02055		2,410515			
183	K	998763381	i' i eč>UI i i B i iui pi u r\ui tou	mui ituvai ic z. ucocn oaui orxat ivi tuvjui i, oaúl uvtam HiyUi i,
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití		2,411	604,00	1 455,95	

Zadní stěna recepce nebude z pórobetonu (bude SDvl.)

č.71

Datum:	25.10.2023
Projektant.
Zpracovatel:

Stavba
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel	IR.Construction s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	2 948,77	

-71 134,18

Náklady soupisu - odpočty
D	HSV	Práce a dodávky HSV	-71134,18
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	-29 670,90	
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouštka příčky 150 mm	m2	-29,820	995,00	-29 670,90	
VV	8,40'3,55	-29,820
VV	Součet	-29,820
D 99	Přesun hmot	-2 834,45	
65	K	998018001	l l coui i mnut piv uuwvy uucaiionu vyotawy, vyvicin, vyivvu a oiucwy iuciii - ucz. uz.ui mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	-2,362	1 200,00	-2 834,45	
29.82'0.07921	-2.362
d 61	Úprava povrchů vnitřních	-38 628,83	
11	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tlouštky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-59,640	318,00	-18 965,52	
vv	příčky
W	8,40'3,55'2	-59,640
VV	Součet	-59,640	
12	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	-59,640	259,00	-15 446,76	
15	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-59,640	70,70	-4 216,55	
W	-59,640	-59,640
W	Součet	-59,640
Náklady soupisu - přípočty	74 082 95
D	HSV	Práce a dodávky HSV	74 082,95
d	763	Konstrukce suché výstavby	74 082,95	
917	K	763211235	i l íčku Z.C ůciui o v laixi mycí i ucccíx o i iuoi iuu iwi ion urxci z. jcui iwuuui ly ui i wciv *yw । pi vinu uvv, CW dvojitě opláštěná deskami II. 2 x 12,5 mm s izolací, El 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw	m2	29,820	2 350,00	70 077,00	
ťoznsmxa k souopni cen
PSC	Poznámka k sotihoiu cen / V cenách jsou započteny / nákhdy na tmeleni 2 Ostalni konutiukce a piáve a piipfalkyti
~r. cň^r* . 'il-n • r.-h	<-rn -v-.in » /-nm/r1 7C "> t '.17	MríAtir -a sí.ífA!rs»,('.’»	■ h Havůh 7 Can< .1'97 až .
vv	příčky
W	8,40*3,55	29,820
VV	Součel	29,820	
934	K	998763304	i i coui i imivi piv nvi loti unvu I iiUi itWal z. Uvocix oaui vrxai tví iv vy vi i, oqmi vviarxi my vi i, cemenlovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	2,050	1 350,00	2 767,67	
Foznamua x ^ouooru cen
PSC	Poznámka k souboru cen : Ceny pro přesun limet stanovený z hmotnosti přesunovaného matenUu se použiji tehdy pokud
29,82*0,06875	2,050
Součel	2,050	
935	K	998763381	i 		nvi	pi v rxvi Toti urxw HiUJHOvcJI IC Z.	ůaui vaai tví ivvy vi i, oauiuviam mycí i,
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 	1	:	i._i:	'.xi... -ur-m..	t	2,050	604,00	1 238,28	
PSC	Poznámka k souboru ceo / pro přesun hmot stanovaný z hmotnosti přesunovaného mstenáu se použiji tehdy pokud

Protipožární nástřik ocelových konstrukcí

č.92

Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Datum:	25.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel	IR.Construction s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem
d	PSV	Práce a dodávky PSV
D	783	Dokončovací práce - nátěry				86 308,40
86 308,40
86 308,40	
1112	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	| m2	30,165	5,21	157,16	
	K	713511512_R	Dodávka a montáž izolace protipožární omítkovinou vč. fixačního nátěru ocelových konstrukcí stropů	m2	30,165	2 856,00	86 151,24	

Bourací práce nutné pro rozvody VZT
Stavba:	č. 99
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo	Mírové náměstí 2950, Teplice	Datum	25.10.2023	
Zadavatel	Dům Kultury Teplice	Projektant	
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				115 359,15	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 334,49	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 540,37	
| 128	IK	96305111.R1	I Vybourání podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo moniérovém rabicovém nebo z pletiva keramid	m2	148,710	427,00	63 499,17	
	w		D 1.1 5a_Výřez_půdorysu_1 ,PP_bourací_práce					
	vv		86,34		86,340			
	w		Mezisoučet" 1 .PP		86,340			
	w		D 1.1,6a_Výřez_půdorysu_1. NP_bourací_práce					
	w		1,000		1,000			
	vv		Mezisoučet" 1 NP		1,000			
	vv		D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce					
	w		1+4,5+1+4,5+4,5+4,5+6,75+6,75+9+9		51.5			
	w		Mezisoučet" 3.NP		51,500			
	vv		D 1.1.8a_Výřez_půdorysu_4.NP_bouraci_práce					
	w		7,67+1+1,2		9,87			
	w		Mezisoučet" 4.NP		9,870			
	w		Součet		148,710			
147 K	971033641	příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4	mí	1,620	1 260,00	2 041,20	
	vv		D. 1 1,9a_Výřez_půdorysu_4. NP_bouraci_práce					
	w		" otvory 800x1000 mm" (0,800’1,000'0,3000)'6		1,440			
	w		" otvory 600x1200 mm" (0,600' 1,200'0,250)'1		0,180			
	w		Mezisoučet" 3.NP		1,620			
	w		Součet		1,620			
	D	997	Přesun sutě				47 794,12	
171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,597	928,00	15 402,31	
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,597	324,00	5 377,53	
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	i	99,582	14,20	1 414,06	
	w		16,597'6 "Přepočtené koeficientem množství		99,582			
	w		Součet		99,582			
.77	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,681	1 560,00	21 342,86	
	w		0,092'148,71 + 1,62'1,8		13,681			
	w		Součet		13,681			
178	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	1	2,916	1 460,00	4 257,36	
	w		1,62'1.8		2,916			

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 024,66	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 024,66	
w	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou	požárního předělu ze sádrokartonových z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	16,715	87,50	1 462,56	
	w		D 1 1 9a_Výřez_4.NP					
	vv		"mč 438" 3,25*1,5		4,875			
	vv		"mč 439" 165’1,6		2.640			
			"mč 442"3,2*1,375		4,400			
	w		"mč 443" 3,2'1.5		4,800			
	w		Mezisoučet" 4.NP		16,715			
	w		Součet		16,715			
934	K	998763304	i ICOUH niiivi piv rwiiouurwo iiiumuvanu z. ucocr\ oauiunai tuiiuvycii, oaui wicirumy vi i, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného	t	0,288	1 350,00	388,35	
935	K	998763381	r ičóuii iiiíivípiú KvíiSuuKCc iiívnivváiič z. ucocn óauiur\ai iviiwy vii, bóuiGviqmmy vii, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez	t	0,288	604,00	173,75	
VV
Součet
2,916

Prostorové lešení ve foyer pro montážní práce
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Misto. Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
č. 106
Datum 25.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 1	
Náklady soupisu celkem					46 939,04	
d HSV Práce a dodávky HSV
46 939,04
1	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m	kus	1,000	8 590,00	8 590,00	
2	K	946112221	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m za každý den použití	kus	30,000	917,00	27 510,00	
3	K	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 9,6 do 10,6 m	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	297,503	12,40	3 689,04	
d 9	Ostatní konstrukce a práce, bouráni	46 939,04

č. 108

Bourání schodišťových ramen železobetonových

Datum:	25.10.2023
Projektant:
Zpracovatel

Stavba.
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice
Zhotovitel	IR.Construction s.r.o.

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

302 676,68

176 706,78

9

Ostatní konstrukce a

156 763,81

110	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	58,490	913,00	53 401,37	
111	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	1 754,700	10,40	18 248,88	
112	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	58,490	639,00	37 375,11	
128	K	96305111.R1	Vybouráni podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo moniérovém rabicovém nebo z pletiva keramid	m2	33,076	427,00	14 123,45	
1163	K	963074969	Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovaných nebo rabicovaných	m	67,500	498,00	33 615,00	

D

s, bouráni

Náklady soupisu celkem
d HSV Práce a dodávky HSV
	D	997	Přesun sutě	19 942,97	
170	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	6,353	165,00	1 048,25	
171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,353	928,00	5 895,58	
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,353	324,00	2 058,37	
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,118	14,20	541,28	
182	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	3,738	2 780,00	10 391,64	
187	K	99701389.R1	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	2,615	3,00	7,85	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			49 369,90	

D	767	Konstrukce zámečnické	49 369,90	
1161	K	767991912	Demontáž zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	221,792	51,10	11 333,57	
1162	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2 893,609	29,60	85 650,83	
1049	K	767996701.1	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	-1 763,500	27,00	-47 614,50	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				76 600,00	
1152	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	200,000	383,00	76 600,00	

Doplnění chybějích profilů U300 ve výtahové šachtě
Stavba
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

č. 109

Datum 25.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel.

Dům Kultury Teplice
IR.Construction s.r.o.

Projektant
Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem i (CZK)	
Náklady soupisu celkem
d HSV	Práce a dodávky HSV				193 856,37
61 210,62	

D	3	Svislé a kompletní konstrukce		10 468,08	
141	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	16,080	651,00	10 468,08	
PSC	roznarnKa x ioud/Ti/ cen.
Poznámku k souboru cen; l Cí ny jsou určeny pro dodatečně snováni diku. 2 Ceny nepláli pro nosné tupě svary nmti rin iVř»/rH/p »’ru ilnřlcv ~'itn	n\^rr- <w^h/h7 .-anami wihMH cen 1 QJ- IM	hine		
w	D. 1.1.5a_Výřez_púdorysu_1. PP_bouraci_práce		
vv	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,010’2)	4,020	
vv	Mezisoučet" 1.PP	4,020	
w	D. 1.1.6b_Výřez_půdorysu_1 NP_nový_stav		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,010’2)	4,020	
w	Mezisoučet" 1.NP	4,020	
w	0.1.1,7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bouraci_práce		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,010’2)	4.020	
w	Mezisoučet" 2.NP	4,020	
w	D.1.1.8a_Výřez_púdorysu_3.NP_bouraci_práce		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,010’2)	4,020	
w	Mezisoučet" 3.NP	4,020	
w	Součet	16,080	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 742,54	
98	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky pres 10 do 25 m	m3	304,760	54,50	16 609,42	
PSC	POZňamha k soudoiu cetr
Poznámku k souboru cen: 1 Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky pí es 25 m se oceňuje inrlMdtiÁInč		
w	D. 1.1. 16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště		
w	" montáž OK schodiště po patrech" (7,6x2,0’20,05)	304,760	
vv	Mezisoučet" 1.PP-3.NP	304,760	
w	Součet	304,760	
99	K	943221212	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m3	9 142,800	2,20	20 114,16	
PSC	poznámka x souhrnu cen’
Poznámka k souboru cen: 1 Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky pros 25 ni se oceňuje inrfiíiw/uáltjč		
w	" předpoklad 30 dnu" 304'30	9 142,800	
w	Součet	9 142,800	

Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice

100	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	304,760	46,00	14 018,96	
PSC	Hoznam^a i< scumofu cen:
Poznámka A souhoiu cen 1 Demontáž lešení prostorového lámoveho těžkého výšky přes 25 rn se oceňuje		
D	PSV	Práce a dodávky PSV		95 877,75	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		85 839,94	
1047	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	799,626	34,80	27 826,99	
PSC	Poznámka k souboru cen
Poznámku k souhrnu cen l Určeni cen se iuk hmotnosti jednotlivě montovaného dílu konstrukce		
w	D. 1.1 5a_Výřez_púdorysu_1 PP_bourací_práce		
w	DOPLNĚNI OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01 '2)'44.40	178,488	
w	" připočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod."178,488'12/100	21.419	
vv	Mezisoučet" 1.PP	199,907	
w	D.1 1 6b_Výřez_půdorysu_1 ,NP_nový_stav		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01 '2)'44,40	178,488	
w	" připočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod."178,488'12/100	21,419	
w	Mezisoučet" 1.NP	199,907	
vv	D 1.1 7a_Výřez_púdorysu_2.NP_bourací_práce		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01 '2)*44,40	178,488	
w	" připočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod "178.488'12/100	21,419	
vv	Mezisoučet" 2.NP	199,907	
w	D. 1 18a_Výřez_púdorysu_3.NP_bouraci_práce		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01'2)'44,40	178.488	
vv	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod "178,488'12/100	21,419	
w	Mezisoučet" 3.NP	199,907	
w	Součet	799,626	
1048	M	13011029	ocel profilová UPE 300 jakost 11 375	1	0,864	64 900,00	56 047,40	
W	" svařenec 2x UPE 300" (2.010'2)'44.40'0.001 '4	0,714	
w	" připočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 0,714'12/100	0,086	
w	Součet	0,800	
w	0,800'1,08 "Přepočtené koeficientem množství	0,864	
w	Součel	0,864	
1050	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,864	1 640,00	1 416,30	
1051	K	998767181	r icouii iiinvi piU z_ai 1 tcui	rxun ion urxv»c oianwciiy í. i iiiimiiiuou pioounwanciiv 1i taici iaiu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,864	636,00	549,25	
D	783	Dokončovací práce - nátěry		10 037,81	
1110	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	15,405	61,40	945,84	
w	D 1.1 5a_Výřez_půdorysu_1 ,PP_bouraci_práce		
vv	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01 '2)'0,958	3,851	
w	Mezisoučet" 1.PP	3,851	
w	D.1.1 6b_Výřez_půdorysu_1 ,NP_nový_stav		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01‘2)‘0,958	3,851	
w	Mezisoučet" 1.NP	3,851	

VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bouraci_práce
W	DOPLNĚNI OK PRO NOVÝ STROP
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01*2)'0,958	3,851	
w	Mezisoučet" 2.NP	3,851	
vv	D. 1.1 9a_Výřez_půdorysu_3.NP_bouraci_práce		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,01 *2)'0,958	3,851	
w	Mezisoučet" 3.NP	3,851	
vv	Součet	15,405	
1111	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,405	71,00	1 093,73	
1112	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	15,405	5,21	80,26	
1113	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,809	136,00	4 190,06	
W	2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR		
w	D. 1.1,5a_Výřez_púdorysu_1 .PPbouracIpráce		
vv	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2.010*2)*0,958*2	7,702	
w	Mezisoučet" 1.PP	7,702	
w	D.1.1 6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav		
w	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2.010‘2)*0,958’2	7,702	
vv	Mezisoučet" 1.NP	7,702	
vv	D.1.1.7a_Výřez_púdorysu_2.NP_bourací_práce		
vv	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
w	" svařenec 2x UPE 300" (2,010*2)*0,958*2	7,702	
vv	Mezisoučet" 2.NP	7,702	
	D.1.1,8a_Výřez_púdorysu_3.NP_bouraci_práce		
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP		
	" svařenec 2x UPE 300" (2.010’2)’0.958*2	7,702	
w	Mezisoučet" 3.NP	7,702	
w	Součet	30,809	
1114	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,809	121,00	3 727,92	
	N00 - Nepojmenované práce		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		36 768,00	
1152	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	96,000	383,00	36 768,00	
w	" nespecifikované či jinak nepopsané dílčí drobné práce"		
w	"kontrolní hlídáni konstrukci po páleni ocelových kce" (12'4)*2	96,000	
w	Součet	96,000