Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK C. 3
SMLOUVY O DÍLO
VZ/22/A/3
2300002
(dále jen „dodatek")
uzavřený dle ustanovení § 2586 a nási. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ"), mezi následujícími smluvními
stranami:
Článek I
Smluvní strany
Objednatel:	Dům Kultury Teplice	
se sídlem:	Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice	
IČO:	00081221	
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:	CZ00081221
417 515 921
Komerční banka Teplice	
číslo účtu:	533501/0100	
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba - ředitel DK Teplice	
oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba	
ve věcech technických: stavební dozor:	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxx	

Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
spisová značka C14364	
se sídlem:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem	
kontaktní adresa:	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem	
IČO:	25041738	
DIČ:
telefon bankovní spojení:	CZ25041738 +420 475 503 361 ČSOB, a.s.	
číslo účtu:	289387719/0300	
zastoupený:	Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil - jednatelé společnosti	
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil - jednatelé společnosti	
ve věcech technických: xxxxx xxxxx, technický a provozní ředitel
Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 25. 4 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa". V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Současně dochází k posunutí termínu dokončení realizace.
2.2.	Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.
Článek III
Vícepráce
3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek IV
Méněpráce
4.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 1 966 986,99 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.
Článek VI
Cena díla
5.2	Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	 72 066 363,17 Kč
Cena za vícepráce bez DPH	 1	966 986,99 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 3....	 74	033 350,16 Kč
DPH (21 %) dle dodatku č. 2	 15	133 936,27 Kč
DPH (21 %) za vícepráce	 413 067,27 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.3	15	547 003,54 Kč
Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 2	 87 200 299,44 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH	 2 380 054,26 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 3	 89	580 353,70 Kč
Článek VII

Změna termínu dokončení
5.3	V dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023 bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 31. 1. 2024. Vzhledem k dalšímu odhalování nových skutečností, rozšiřování předmětu díla, úpravám technického řešení a pokračujícím projekčním pracím, není termín 31. 1. 2024 proveditelný. Na základě znalostí rozsahu řešených změn a víceprací, stanovujeme termín dokončení díla na 31. 3. 2024. Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 6.2 Termín dokončení prací: do 31. 3. 2024.
5.4	Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku změnový list č. 3.
Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
8.2	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8.3	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
8.4	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8.6	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0001/24 ze dne 08. 01. 2024.
Přílohy:
1) Změnový list č. 3

V Ústí nad Labem, dne 22.1.2024
Za zhotovitele:

V Teplicích, dne 15.1.2024
Za objednatele:

Ing. Přemysl Soba
Ředitel DK Teplice

Daniel Přibyl
Jednatel společnosti
xxxx xxxxx xxxxxx
Jednatel společnosti

IRXonsInzctlan x.r.a.
85W49
490 07 Ústí nad Labem

oao&wu Dum kuiluzy Tsplícu M?u«6 náméeti 2950 415 01 Tepte*

Projekt:
číst:
Nátev:
Zit:
Datum vystavení:
Podklady:

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce foyer DKTeplice_2.etapa ArcMtektonicko-stavebnf FcJení Zmény stavby, posun termínu 03
20.12.2023
Popis změny:	íminwj list obsahuje vyčísleni zrněny rozsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnosti’ zjiitěnými v prOběhu realizace, poíadavky objednatele na zrniny nebo doplnění a zohledňují také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výměr.	
Zdůvodněni zrniny:	Při realhati stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o poíadavfcy objednatele a zohlednil rozdíly mezi P9 a výkazem výměr.
Jednotlivé změny jsou zpracovány formou dflčfch rozpoít3 a jsou součástí tohoto Změnového líslu.
V tomto Zl se jedná o následující práce a dodávky:	
	110 Realizace světelných stropů	
	111 Korkový nástřít objektu 01.1.1	
	112 Povlaková podlaha v zázemí KS	
		
	5 ohledem na daiií odhalování nových skutečnosti, rnrllřová.il předmětu díla. úpravám technického řečení o pokračujícím projekčním pracím (předpojatí dokončeni projekčních prací do 15.12024), předpokládáme termín dokončení díla ca 313.2024. částí stavby které Jsou technicky doletěny a jejkhí změrry Ji2 byly uplatněny budou dokončeny do 31.3.2024.	
DSP
Početp73oh:

Cenový dopad (je-8 nífakýj:	Připočti:	Odpočty;	Celkem za změnu:	
bez DPH	3 166 h'n.22 Kč	-1 199 692.28 Kč	1 366 ?«6,59 Kč	
DPH21M	665 002,65 Kč	-251 935,38 KČ	413 067,27 Kč	
. DPH	3 83 1 681,92 Kč	-1451627.66 Kč	2 3SC 054.25 Kč	
časový dopad (je-li nijaký):	ANO	Předpokládaný termíndckccčení dlU do 31-D.3.2024
	 	   q	
Dopad do standartu Qe-U nějaký):	NENÍ		
Dopad do změny PO {je-fl nějaký):	ANO	letěné změny nají dopad do PD, shrnutí změn bude obsaieno v USPS	
Dopad na smhnerf mSníky (Je-# nějaký):	NE	1	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU		 			 -											 -	

Vystaví:
Změnové rozpočty s výkazem výměr pro ZL č. 3/2023

Cena s DPH

v CZK

2 380 054 Kč

Stavba:	Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa	
Objednavatel:	Dům Kultury Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice				
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
TDI:	Xxxx xxxxx xxxxxx				
	
poř.číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH	
110	Realizace světelných stropů Zumtobel ve Foyer	-1 152 259,76	1 730 510,89	578 251,13	
111	Korkový nástřik objektu D 1.1.1	-47 432,52	1 049 743,67	1 002 311,15	
112	Povlaková podlaha v zázemí KS	0,00	386 424,71	386 424,71	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Celkem		-1 199	3 166 679,27	1 966 986,99	
					
Cena bez DPH			1 966 986,99 Kč	
DPH základní
snížená
1 868 886.88
0.00
2 380 054,26
0 00

110 - Realizace světelných stropů Zumtobel ve Foyer
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Místo:	Mírové náměstí 2950, Teplice	Datum:	18.12.2023
Zadavatel:	Dům Kultury Teplice	Projektant:
Zhotovitel:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	578 251 13
d Dl	-1 152 234,00	
6	M	900509013	C svítidlo Zumtobel ON DAR 1 A II LED pr.600 mm	ks	-18,000	14 470,00	-260 460,00	
7	M	900509013.1	D svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.800 mm	ks	-16,000	26 234,00	-419 744,00	
8	M	900509014	E svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr. 1000 mm	ks	-11,000	40 625,00	-446 875,00	
85	K	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	-45,000	559,00	-25 155,00	
d HSV	Práce a dodávky HSV	-25,76
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-25,76	
1153	K	949. R1	Oprava chyby změnového listu č. 2	kpl	1,000	-25,76	-25,76	
d M	M	1 730 510,89
D D7	Světelné stropy Foyer	1 730 510,89	
1154	M	700.100.R1	CMSV 30750-925-65 MSC B1DLAVLDE 9016, 5x2m + 5x1 m, + 5x2m, objednací kód 42950491	kus	2,000	359 343,87	718 687,74	
1155	M	700.101. R2	CMSV PANEL MSC B1SLAV+9016, objednací kód 42950488	kus	1,000	87 988,76	87 988,76	
1155	M	700.102. R3	CMSV 13838-925-65 MSC B1DLAV LDE 9016, objednací kód 42950483	kus	1,000	177 387,80	177 387,80	
1157	M	700.103. R4	CMSV 8303-925-65 MSC B1DLAV LDE 9016, objednací kód 42950492	kus	3,000	112 492,03	337 476,09	
1158	M	700.104. R5	CMSV PANEL MSC B1SLAV+ 9016, objednací kód 42950490	kus	2,000	36 289,57	72 579,14	
1159	M	700.105. R6	Řízení: LITECOM CCD DALI-2, objednací kód 22171127	kus	1,000	14 237,53	14 237,53	
1160	M	700.106.R7	LITECOM APP SL, objednací kód 22169151	kus	1,000	1 779,59	1 779,59	
1161	M	700.107.R8	LITECOM APP Shows, objednací kód 22169160	kus	1,000	4 271,26	4 271,26	
1162	M	700.108.R9	ED-4RUKS, objednací kód 22169939	kus	4,000	3 559,59	14 238,36	
1163	M	700.109.R10	28000007 ED-Cxx ( V), objednací kód 22169201	kus	8,000	4 294,95	34 359,60	
116Z	K	700.110.R11	Montáž a nastavení, objednací kód 80005310	kpl	1,000	218 212,50	218 212,50	
1165	K	700.111.R12	Logistika	kpl	1,000	49 292,52	49 292,52	

111 “ Korkový nástřik objektu D 1.1.1
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

Místo-
Zadavatel:
Zhotovitel:

Mírové náměstí 2950, Teplice
Dům Kultury Teplice IR.Construction s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovate

18.12.2023

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	1 002 311,15
d HSV	Práce a dodávky HSV	909 244,87
d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-47 180,52	
66	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-94,740	89,00	-8 431,86	
' V	1x STĚRKA + 1x NÁSTŘIK KORKOVOU DRTÍ
W	D.1.1.9_Púdorys_4.NP_nový_stav
W	-6,900*2 " m.č. 429 (úprava korkovou drti)	-13,800
VV	-40,470*2 " m.Č. 431 (úprava korkovou drtí)	-80,940
VV	Mezisoučet ’ 4.NP	-94,740
VV	Součet	-94,740	
67	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-47,370	234,00	-11 084,58	
W	D.1.1.9_Púdorys_4.NP_nový_stav
W	-6.900" m.č. 429 (úprava korkovou drtí)	-6,900
VV	-40,470" m.č. 431 (úprava korkovou drtí)	-40.470
VV	Mezisoučet" 4.NP	-47,370
VV	Součet	-47,370	
69	K	61135117.R1	Omítka korkovou drtí vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 3 mm dekorativní vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-47,370	584,00	-27 664,08	
W	D. 1.1.9_Púdorys_4.NP_nový_stav
VV	-6,900" m.č. 429	-6,900
VV	-40,470 "m.č. 431	-40,470
vv	Mezisoučet" 4.NP	-47,370
VV	Součet	-47,370
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	238 904,69	
3001	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 128,460	45,20	96 206,39	

w	1.PP	
vv	86,720*3,200	277.504	
vv	2.NP		
vv	"1" 81,600*3,050	248,880	
w	"2"10,250*3,800	38,950	
w	"3"4,200*4,550	19,110	
vv	"4"9,900*5,300	52,470	
vv	"5"2,700*3,050	8,235	
vv	"6"88,310*4,605	406,668	
vv	3.NP		
vv	“1"4,200*3,500*6,300	92,610	
vv	"1 "4.200*3,500*10,320	151,704	
vv	"1"3,500’1,500*10,320	54,180	
vv	"1”4,450*1,500*4.400	29,370	
w	"1'7,850*1,500*4.000	47,100	
W	4.NP		
w	"1"34,900*3,100	108,190	
vv	"2"6,300’3,000	18,900	
vv	"3"16,170*3,200	51,744	
vv	"4'7,000*1,850*3,550	45,973	
w	"5'7,000*2,640*4,350	80,388	
vv	"6'7.000*1,850*5.100	66,045	
vv	'7'7,000*1,650*3,750	43,313	
vv	"8'7,000’0,800*5,500	30,800	
vv	"9'7,000*1,540’4,850	52,283	
vv	“10'7,000’0,400’4,600	12.880	

"11'7.000'1,540*4,500	48,510
"12'7,000*0.800*4,100	22,960
VV	“13'7.000*1,540*3,600	38,808
"14'7,000*0,400*2,900	8,120
W	"15'7,000*1.540*3,600	38,808
'A	"16'7,000*1,540*3,150	33,957
/V	Součet	2 128,460	
300:	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	63 853,800	0,61	38 950,82	
2128,460*30	63 853,800	
3007	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 128,460	27,20	57 894,11	
300f	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	72,515	11,40	826,67	
v	2.NP
W	7,450+3,650+3,650+3,245+4,245+3,650	25,890
VV	3.NP
W	7,450+3,650+3,650+3,245+4,245+3.650+7,000	32,890
VV	4.NP
W	(1,860+2,000+0,400+5,600)+3,875	13,735
W	Součet	72,515	
3006	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	2 235,450	0,16	357,67	
VV	74,515*30	2 235,450
W	Součet	2 235,4 50	
300$	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	72,515	6,99	506,88	
107	K	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky	m2	520,780	56,60	29 476,15	
vv	Poznámka k položce
W	cena SOD-D.1.1.1
w	1.PP
W	86,720	86,720
W	2.NP
W	"1" 81,600	81,600
W	"2" 10,250	10,250
W	"3"4,200	4,200
VV	"4"9,900	9,900
"5"2,700	2,700
W	"6"88,310	88,310
W	3.NP
VV	"1"4,200*3,500	14,700
W	“1"4,200*3,500	14,700
VV	"1 "3,500* 1,500	5.250
VV	"1 "4,450* 1,500	6,675
VV	"1'7,850*1,500	11,775
VV	4.NP
W	"1 "34,900	34,900
W	"2"6,300	6,300
VV	"3"16,170	16,170
VV	"4"7,000*1,850	12,950
W	"5'7,000*2,640	18,480
W	"6'7,000*1,850	12,950
VV	"7'7,000*1,650	11,550
W	"8'7,000’0,800	5,600
W	"9'7,000*1,540	10,780
W	"10'7,000*0,400	2,800
W	"11'7,000*1,540	10,780
VV	"12'7,000*0,800	5,600
VV	"13'7.000*1,540	10,780
VV	"14'7,000*0,400	2,800
W	"15'7,000*1,540	10,780
VV	“16'7,000*1,540	10,780
W	Součet	520,780	
108	K	949211231	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132	m2	15 623,400	0,94	14 686,00	
VV	Poznámka k položce
W	cena SOD-D.1.1.1
W	"předpoklad 30 dnů" 520,780*30	15	623,400	

Součet
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	529,637	130,00	68 852,81	
	w		Poznámka k položce					
			cena: SOD-D 1.2.					
	w		1.NP					
	W		(7,490*3,875)+(1,860+2,000+0,400+2,000+5,600)*7,000		112,044			
	W		2.NP					
	w		(3.350*7,450)+(24,225*7,000 )+(3,600*24,500)		282,733			
	w		3.NP					
	vv		81,760		81,760			
	vv		4.NP					
	vv		(15,800*1.500)+(4,200*7,000)		53,100			
	w		Součet		529,637			

15 623,400
d 95 			 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 							68 852,81
D 998
Přesun hmot
188	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,210	1 200,00	-252,00	

-252,00
D 763
648 919,89
300Cj K	76313179. R1	Ruční broušení stávajícího korkového nástřiku	m2	332,160	655,13	217 607,98	

Konstrukce suché vý
W	1.PP	
vv	34,000	34,000	
W	Mezisoučet	34,000	
vv	1.NP		
w	8.790	8,790	
vv	Mezisoučet	8,790	
w	2.NP		
Vv	121.000	121,000	
w	Mezisoučet	121,000	
vv	3.NP		
vv	61,400	61,400	
vv	Mezisoučet	61,400	
V ■	4.NP		
vv	154,340-47,370	106,970	
vv	Mezisoučet	106,970	
	Součet	332,160	

300C	K	76313179.R2	Ruční čištění povrchu po broušení	m2	332,160	115,00	38 198,40	
3017	K	76313179.R3	Penetrace	m2	332,160	299,00	99 315,84	
301C	K	76313179.R4	Korkový nástřik podhledu, příplatek za každý další mm	m2	332,160	146,80	48 761,09	
7	K	763131790	Korkový nástřik podhledu tl.5mm (dodávka+montáž)	m2	332,160	734,00	243 805,44	
182	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,710	1 130,00	802,30	
VV	Poznámka k položce
VV	cena SOD-D.1.2
VV	0,710	0,710	
183	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,710	604,00	428,84	
W	Poznámka k položce
W	cena SOD-D.1.2
VV	0,710	0,710
d PSV	Práce a dodávky PSV	93 066,28
D 741	Elektroinstalace - silnoproud	67 826,27	
46	K	218202003	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního stropního závěsného na oku přes 10 kg	kus	71,000	294,00	20 874,00	

Poznámka k položce
W

W	cena: ZL č. 1
VV	3.NP
W	14+8	22,000
vv	2.NP
VV	23+3+23	49,000
W	Součet	71,000	
3012	K	741370013	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 3 zdroje	kus	71,000	218,00	15 478,00	
3011	K	741378003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus	71,000	436,00	30 956,00	
301:	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	673,080	0,77	518,27	
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	25 240,01	
111£	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,160	5,69	1 889,99	
vv	Poznámka k položce
W	cena-SOD-D.1.1.1
VV	332,160	332.160
W	Součet	332,160	
3014	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	969,308	10,90	10 565,46	
W	3.NP
W	"zábradlí" (7,000+1,000)‘2*2	32,000
vv	"zábradlí vč.soklu" (7,800+1,500)‘2‘2	37,200
VV	"zábradlí vč.soklu" (8,900+1,500)*2*2	41,600
vv	"zábradlí" (8,300+1,000)‘2*2	37,200
'•'V	"sokly"(7,450+4,410+7,490+8,650+8,650+4,410+3,350)*0,500	22,205
W	"stěny do 1m od korku" (31,775+24,530+24,530+31,775+7,425)	120,035
W	4.NP
'/V	"zábradlí vč.soklu" (2,800+1,500)*2*2	17,200
W	"zábradlí	vč.soklu"	(15,500+1,500)*2*2	68,000
W	"zábradlí vč.soklu" (1,500+1,500)*2*2	12,000
"dveřní otvor"
VV	(2,100+1,800+1,800)+(2,100+0,800+2,100)+(2,100+1,600+2,10	22,500
0)+(2,100+1,800+2,100) vv	"sokly" (4,250+7,000+20,000)*0,200	6,250
VV	"stěny do 1m od korku" (31,775+24,530+24,530+31,775+7,425)	120,035
W	2.NP
VV	"zábradlí" (8,300+1,000)*2‘4	74,400
VV	"zábradlí vč.soklu" (8,300+1,500)*2*2	39,200
VV	"zábradlí" (4,150+1,000)*2*2	20,600
VV	"zábradlí" (7,500+1,000)‘2*2	34,000
VV	"SOkly"(	48 073
7,300+31,775+4,310+8,650+24,530+3,580+8,000+8,000)'0,500	’
"dveřní otvor" (
vv	1,900+2,200+1,900)‘7+(2,100+0,800+2,100)+(1,75+5,400+5,40	59,550
0)
W	"okno" (15,500+3,300)*2	37,600
vv	"stěna s mřížkou" (2,500+3,500)*2	12,000
VV	"stěny do 1m od korku" (31,775+24,530+16,000+3,580+31.775)	107,660
W	Součet	969,308	
3015		58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	1 017,773	2,78	2 829,41	
W	969,308*1,05'Přepočtené koeficientem množství	1017,773	
1125	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 203,330	5,69	6 846,95	
vv	Poznámka k položce
W	cena-SOD-D.1.1.1
VV	3.NP
W	"zábradlí” (7,000*1,000)*2	14,000
VV	"zábradlí" (7,800*1,500)‘2	23,400
VV	"zábradlí“ (8,900*1,500)*2	26,700
VV	"zábradlí" (8,300*1,000)*2	16,600
VV	"sokly"(7,450+4,410+7,490+8,650+8,650+4,410+3,350)'0,200	8,882
vv	"podlaha" (7,000*8,300)+(7,800*2,900)+(8,300'2,900)	104,790
"stěny do 1m od korku" (31,775+24,530+24,530+31,775+7,425)*1,000	’
VV	4.NP
W	"zábradlí" (2,800*1,500)*2	8,400	

'N
'Af	"zábradlí" (15,500*1,500)*2
"zábradlí" (1,500*1,500)*2	46.500
4,500	
	"dveřní otvor"
(2,100* 1,800)+(2.100*0,800)+(2,100'1,600)+(2,100* 1,800)	12,600	
y-;	"sokly" (4,250+7,000+20,000)*0,200	6,250	
w	"podlaha" (7,000‘4,000)+(15,500*1,500)	51,250	
v V	"stěny do 1m od korku"
(31,775+24,530+24,530+31,775+7,425)*1,000	120,035	
VV	2.NP
"zábradlí" (8,300’1,000)*4	33,200	
VV	"zábradlí" (8,300*1,500)*2	24,900	
VV	"zábradlí" (4,150*1,000)*2	8.300	
v v	"zábradlí" ( 7,500*1,000)‘2	15.000	
vv	"sokly" (
7,300+31,775+4,310+8,650+24,530+3,580+8,000+8,000)‘0,200	19,229	
'•'V	"dveřní otvor" ( 1,900‘2.200)'7+(2,100'0,800)+(1,75*5,400)	40.390	
w	"okno" (15,500*3,300)	51.150	
VV	"stěna s mřížkou" (2,500*3,500)	8,750	
	"podlaha"
(24,600*4,000)+(4,000*12,500)+(3,300*32,000)+(8,500*3,800)+ (4,150*4,460)	304,809	
VV	"stěna" (4,000’6,500)	26,000	
vv	"stěny do 1m od korku"
(31,775+24,530+16,000+3,580+31,775)*1,000	107,660	
vv	Součet	1 203,330	
	M	58124844	fólie pra malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m	m2	1 263,497	2,46	3 108,20	
w	Poznámka k položce		
vv	cena-SOD-D.1.1.1		
VV	1203,330*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	1 263,497	
vv	Součet	1 263,497	

112- Povlaková podlaha v zázemí KS
Stavba:
Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

d PSV

Práce a dodávky PSV

384 042,30

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:	Mírové náměstí 2950, Teplice
Dům Kultury Teplice IR.Construction s.r.o.	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:	18.12.2023	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					386 424,71	

d HSV	Práce a dodávky HSV	2 382,41
D 997	Přesun sutě	2 382,41	
171	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,557	928,00	516,90	
174	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,557	324,00	180,47	
175	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,342	14,20	47,46	
'/V	0.557*6 "Přepočtené koeficientem množství	3,342
W	Součet	3,342	
183	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,557	2 940,00	1 637,58	

D 776	Podlahy povlakové	384 042,30	
1075	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	168,000	49,90	8 383,20	
1076	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	168,000	15,30	2 570,40	
1077	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	168,000	38,50	6 468,00	
1078	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	168,000	246,00	41 328,00	
1080	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	168,000	150,00	25 200,00	
W	D.1.1.6b-Výřez půdorysu 1 .NP
W	" PVC" 21,68+39,40	61,080
W	D.1,1.6-Půdorys 1.NP nový stav
(2,600'16,000)+(4,750*7,680)+(2,700*4,1850)+(0.750’1,200)+9
,010+7,630	106,920
VV	Mezisoučet" 1.NP	168,000
vv	Součet	168,000	
1083	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	168,000	166,00	27 888,00	
1208	M	28411126	PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové třeni p 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <10*8	m2	201,600	900,00	181 440,00	
W	168,000*1,200	201,600
W	Součet	201,600	
1085	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	84,000	67,20	5 644,80	
W	168,000/2,000	84,000
vv	Součet	84,000	
1086	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	175,000	15,00	2 625,00	
W	175,000	175,000	

	W		Součet		175,000			
1089	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	175,000	73,30	12 827,50	
	W vv vv		D. 1.1,6_Púdorys_1 .NP_nový_stav 175,000
Součet		175,000
175,000			

I 1209	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	192,500	80,10	15 419,25	
175,000*1,1	192,500
W	Součet	192,500	
1092	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	175,000	43,90	7 682,50	
D.1.1,6_Půdorys_1 .NP_nový_stav
77	175,000	175,000
W	Součet	175,000	
1093	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	168,000	42,10	7 072,80	
1094	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	168,000	45,50	7 644,00	
1095	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	168,000	180,00	30 240,00	
W	D.1.1,6b-Výřez půdorysu	1 .NP
W	"PVC" 21,66+39,40	61,080
V	D.1.1.6-Púdorys 1.NP nový	stav
(2,600*16,000)+(4,750*7,680)+(2,700*4,1850)+(0,750*1,200)+9
,010+7,630	106,920
W	Součet	168,000	
1096	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,544	585,00	903,24	
1097	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,544	457,00	705,61