DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	VZ/22/A/3
Číslo smlouvy zhotovitele:	2300002
(dále jen „dodatek“)
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Dům Kultury Teplice
se sídlem:			Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO:				00081221
DIČ:				CZ00081221 
telefon:				xxx xxx xxx
bankovní spojení:		Komerční banka Teplice
číslo účtu:			533501/0100
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba – ředitel DK Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
ve věcech technických:	Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx
stavební dozor:		Ing. xxxxx xxxxxx

Z h o t o v i t e l :			IR.Construction s.r.o.
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
spisová značka C 14364
se sídlem:			Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
kontaktní adresa:  	 	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
IČO:				25041738
DIČ:				CZ25041738
telefon				+420 xxx xxx xxx
bankovní spojení:  		ČSOB, a.s.
číslo účtu:             		289387719/0300
zastoupený:			Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil – jednatelé společnosti
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil – jednatelé společnosti
ve věcech technických:	xxxxx xxxxx, technický a provozní ředitel

Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 25. 4 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Současně dochází k posunutí termínu dokončení realizace. 
2.2.	Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

Článek III
Vícepráce
3.1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek IV
Méněpráce
4.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, jejichž potřeba provedení odpadla, příp., jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: 4 824 645,29 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek VI
Cena díla
6.1	Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 4...................................................   77 944 769,33 Kč
Cena za vícepráce bez DPH ...................................................................     4 824 645,29 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 5........................  82 769 414,62 Kč

DPH (21 %) dle dodatku č. 4.................................................................... 16 368 401,57 Kč
DPH (21 %) za vícepráce..........................................................................   1 013 175,51 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 5 ……………………..  17 381 577,08 Kč

Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 4...............................................   94 313 170,90 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH ...............................................................      5 837 820,80 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 5 ..................  100 150 991,70 Kč

Článek VII
Změna termínu dokončení
7.1	V dodatku č. 4 ze dne 28. 03. 2024 bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno do 30. 04. 2024. 
Vzhledem k dalšímu odhalování nových skutečností na stavbě a zpracovávaných změn PD elektroinstalace foyer, stanovujeme termín dokončení: na 06. 05. 2024 - 1. části díla (koncertní a estrádní sál, kanceláře SČF a ostatní prostory nezahrnuté ve 2. části), na 31. 05. 2024 - 2. části díla (foyer a WC v 1.NP a společenský klub).  
Na základě těchto skutečností mění podpisem tohoto dodatku smluvní strany obsah čl. VI odst. 6.2 
této smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 
       6.2 Termín dokončení prací: 1. část do 06. 05. 2024, 2. část do 31. 05. 2024.

7.2 Vzhledem k výše uvedenému tvoří přílohu tohoto dodatku Změnový list č. 5.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

8.2	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.3	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změny.

8.4	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.6	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0367/24 ze dne 26. 04. 2024.

	
V Teplicích, dne	 30. 4. 2024					V Ústí nad Labem, dne 30,4.2024

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	

..................................................			..................................................
Ing. Přemysl Šoba					Daniel Přibyl
Ředitel DK Teplice					Jednatel společnosti 	

……………………………………………………
Ing. Karel Složil	
Jednatel společnosti