DODATEK Č. 7
SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:	VZ/22/A/3
Číslo smlouvy zhotovitele:	2300002

(dále jen „dodatek“)
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I
Smluvní strany

O b j e d n a t e l :			Dům kultury Teplice
se sídlem:			Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČO:				00081221
DIČ:				CZ00081221 
telefon:				417 515 921
bankovní spojení:		Komerční banka Teplice
číslo účtu:			533501/0100
zastoupený:	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Ing. Přemysl Šoba
ve věcech technických:	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
stavební dozor:		xxxx xxxxx xxxxxx

Z h o t o v i t e l :			IR.Construction s.r.o.
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
spisová značka C 14364
se sídlem:			Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
kontaktní adresa:  		Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
IČO:				25041738
DIČ:				CZ25041738
telefon:				+420 475 503 361
bankovní spojení:  		ČSOB, a.s.
číslo účtu:             		289387719/0300
zastoupený:			Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil - jednatelé společnosti
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:	Daniel Přibyl, Ing. Karel Složil - jednatelé společnosti
ve věcech technických:	xxxxx xxxxx, technický a provozní ředitel

			       Článek II
Preambule
2.1.	Mezi smluvními stranami došlo dne 25. 4 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. 

2.2.	Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku. 

Článek III
Vícepráce
3.1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek IV
Méněpráce
4.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba, jejichž provedení odpadla, případně, jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku. 

Článek V
Cena víceprací a méněprací
5.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku  - 116 662,31 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se snižuje cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek VI
Cena díla
6.1	Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 6 ..................................................   83 519 266,85 Kč
Cena za vícepráce bez DPH ...................................................................      - 116 662,31 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 7 ........................  83 402 604,54 Kč

DPH (21 %) dle dodatku č. 6 ................................................................... 17 539 046,04 Kč
DPH (21 %) za vícepráce...........................................................................    - 24 499,09 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 7 ………………..…..  17 514 546,96 Kč

Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 6 ............................................... 101 058 312,90 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH .................................................................    - 141 161,40 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 7 .................  100 917 151,50 Kč

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1	Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.

8.2	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.3	Tento dodatek smlouvy o dílo upravuje preambuli dodatků č. 4 a 5 a odkazuje tyto dodatky na 
§ 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

8.4	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změny.

8.5	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.6	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.7	Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0458/24 ze dne 17.06.2024. 

Přílohy: 
1) Změnový list č. 7
	
V Teplicích, dne 19. 6. 2024				V 		 dne 19. 6. 2024

Za objednatele:		                                    Za zhotovitele:	

..................................................			..................................................
Ing. Přemysl Šoba					Daniel Přibyl
Ředitel DK Teplice					Jednatel společnosti 	

……………………………………………………
Ing. Karel Složil	
Jednatel společnosti